문서번호	도로관리과-4765
결재일자	2014.3.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	도로안전시설팀장	도로관리과장		시설안전정책관
문미주	代권완택	최동필		전결 03/25 정시윤
협 조

해빙기대비 도로사면 안전점검 결과 보고

2014.  3.

도 시 안 전 실

(도 로 관 리 과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 ■	(	사면전문가 참여	)	무 □
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

해빙기대비 도로사면 안전점검 결과 보고

해빙기대비 도로사면 안전점검 결과, 위험 및 장애요인은 즉시 제거하고 보수․보강이 필요한 대상지에 대하여는 우기전까지 정비 완료 하여 시설물 안전성을 확보하는 등 재해예방에 만전을 기하고자 함.

1		점검개요

□ 점검기간 : ‘14. 2. 17. ~ 3. 19.(30일간)

□ 점검대상

○ 시·구도상 관리하고 있는 도로사면(비탈면) 299개소

○ 그 밖에 재해예방을 위하여 안전점검이 필요한 인공·자연비탈면

□ 점검방법

○ 유지관리기관(부서)별 사면전문가를 포함한 점검반 편성 후 점검 실시

○ 점검내용 : 점검표(체크리스트)에 의한 현장확인

2		점검결과

□ 점검인원 : 총 45개반 192명

○ 자치구 : 33개반 163명 (전문가 21명, 공무원 142명)

○ 도로사업소 : 12개반 29명 (전문가 3명,  공무원 26명)

□ 점검결과

(단위 : 개소)

구 분		점검대상	안 전	보수·보강필요	경미한보수	비 고
계		299개소	253개소	2개소	44개소
	시 도	195개소	158개소	1개소	36개소
	구 도	104개소	95개소	1개소	8개소

3		주요 점검결과 및 조치계획

□ 도로사면 보수·보강필요 : 2개소

① 서초구 반포동 산40-9 도로비탈면 (시도)

- 시설물 제원 / 관리주체 : 높이 27m, 연장 80m / 서초구청 토목과

- 점검결과 (사면전문가 의견)

	▸ (동측사면) 암반 불연속면 발달, 암반내 잡목뿌리 식생에 따른 뜬돌 낙석 우려 ▸ (서측사면) 상부 사면에 풍화대 노출 및 배수로가 설치되어 있지 않아 집중강우시 사면 유실 가능성	불연속면암반에 잡목식생 및 뜬돌 분포

- 조치계획

▸정밀안전진단 용역을 위한 시비지원 요청에 따라, 시비 지원하여 정밀진단을 실시하고 그 결과에 따라 보수·보강 조치 (서초구 지원요청액:41,540천원)

② 강서구 화곡동 42-37 도로옹벽 (구도)

- 시설물 제원 / 관리주체 : 높이 3.2m, 연장 55m / 강서구청 도로과

- 점검결과 (사면전문가 의견)

	▸ 정밀안전진단결과, 안전성 평가 E등급 판정 ▸ 우기 시 붕괴위험이 있어, 우기 전 긴급대책 시행 및 중․장기대책 수립 필요

- 조치계획 (자치구 계획)

▸ 긴급대책으로 노면수 유입 방지를 위한 옹벽상부 하수관개량 및 도로재포장(4월중), 특별안전관리대책 수립 및 항구적 안전성 확보를 위한 보수․보강 추진

□ 경미한 보수사항 : 44개소

(단위 : 개소)

구 분		계	옹벽 이음부 등 균열 보수	배수로 퇴적물 준설 등	기타 안전시설 (휀스등) 정비	비 고
지적사항	계	44개소	30개소	8개소	6개소
	시 도	36개소	24개소	7개소	5개소
	구 도	8개소	6개소	1개소	1개소
조 치 계 획		우기 전 조치완료	균열보수 등 6월말까지 조치	배수로준설 3월말 시설파손정비 4월말	기타안전시설 정비 4월말까지 조치

< 옹벽이음부 보수 필요 >	< 배수로 준설 필요>	<기타 안전시설 정비>

4		향후 추진계획

□ 점검결과 조치계획

○ 보수․보강 필요 사항

- 서초구 반포동 도로비탈면 : 시비지원하여 정밀안전진단을 실시하고 점검결과에 따라 보수․보강 조치

- 강서구 화곡동 도로옹벽 : 자치구 시설로 특별안전관리토록 조치

○ 경미한 보수사항

- 옹벽이음부 등 균열보수사항 : 6월말까지 조치

- 배수로 퇴적물 준설 등 : 배수로 준설 3월말, 시설파손정비 4월말까지 조치

- 기타 안전시설(휀스 등) 정비사항 : 4월말까지 조치

□ 우기대비 도로사면 안전점검 실시

○ 점검대상 : 시도 및 구도상 관리하고 있는 도로사면 299개소

○ 점검기간 : ‘14. 5. 1. ~ 5. 31.(30일간)

○ 점검방법 : 유지관리기관(부서별) 자체 점검반 편성 점검

붙임  1. 해빙기 도로사면 안전점검 결과 1부.

2. 안전점검 현황사진 1부.  끝.