문서번호	설비부-2201
결재일자	2017.2.13.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시책사업과장	설비부장
백남진		임현근	02/13 代유병기
협조

『어린이병원삼성발달센터증축 전기·통신공사』

관급자재 납품기한 연기 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 02.

관급자재 납품기한 연장 검토보고

「어린이병원 삼성발달센터증축 전기·통신공사」

「어린이병원삼성발달센터 증축 전기·통신공사」의 관급자재에 대하여 공정일정 변경에 따라 납품기한 연장하고자 보고 드림.

1		관련근거

□ 어린이병원 전기공사 관급자재 납품연기요청 : 서도기 전 028(2017. 02. 08.)

□ 어린이병원 통신공사 관급자재 납품연기요청 : 서도기 통 026(2017. 02. 07.)

2		공사개요

□ 공 사 명 : 서울시어린이병원삼성발달센터증축 전기·통신공사

□ 공사규모 : 지하2층/지상5층 연면적11,950㎡ 전기·통신설비 1식

□ 공사기간 : 2015. 04. 20 ～ 2017. 05. 30

□ 공 사 비

- 전기 2,262,548천원(도급비1,137,826, 관급비1,018,417, 이전비106,305)

- 통신 860,839,640원(도급비490,955,000원, 관급비369,884,640원)

□ 시공사(전기/통신) : 길흥전기(주)/유복전기(주)

□ 감 리 사 : (주)영화키스톤

3		검토내용

가. 관급자재 계약 현황

□ 전기분야

품 목	건 명	계약업체	계약금액	납품기한	비고
조명기구	LED슬림매입등외 9종	㈜해든 외 3	199,222,160	2017.02.19
수배전반	수배전반구매	㈜동보파워텍	501,000,000	2017.02.19
UPS	UPS장비구매	㈜영신 엔지니어링	55,336,000	2017.02.19

□ 통신분야

건 명	품 목	계약업체	계약금액	납품기한	비 고
전관방송 및 AV설비	오디오앰프	㈜인터엠	40,606,700	2016.12.30
	영사기 및 오디오커넥터	행복한사람들㈜	9,821,000	2016.12.30
	비디오프로젝터	유환아이텍㈜	9,977,000	2016.12.15
	플러그용 잭	㈜케빅	460,000	2016.12.30

가. 관급자재 납품기한 연기

□ 납품기한 연장 사유

- 선행공정(건축분야) 지연에 따른 납품(설치)시기 미도래

□ 전기분야

건명	납품요구번호 (계약번호)	계약자	계약금액	납품기한		비 고
				당초	변경
수배전반	(*******65000)	㈜동보파워텍	501,000,000	2017.2.19	2017.5.30	계약번호
LED슬림매입등외 9종	12-16-2-20645-01	㈜선일일렉콤	12,421,500	2017.2.19	2017.5.30
	12-16-2-20643-00	서광조명	131,406,660	2017.2.19	2017.5.30
	12-16-2-20644-00	서광조명	18,850,000	2017.2.19	2017.5.30
	12-16-2-45118-00	서광조명	520,000	2017.2.19	2017.5.30
	12-16-1-25619-00	㈜에펠	15,580,000	2017.2.19	2017.5.30
	12-16-2-20646-00	㈜해든	20,444,000	2017.2.19	2017.5.30
UPS 장비구매	12-16-2-14999-01	㈜영신엔지니어링	55,336,000	2017.2.19	2017.5.30

□ 통신분야

건 명	납품요구번호	계약업체	계약금액 (원)	납품기한		비 고
				당 초	변 경
전관방송 및 AV설비	12-16-2-17090-00	㈜인터엠	29,692,900	2017.02.19	2017.05.30
	12-16-2-17083-00		5,159,800	〃	〃
	12-16-2-17075-00		5,754,000	〃	〃
	12-16-2-17094-00	행복한 사람들㈜	1,460,000	〃	〃
	12-16-2-17098-00		1,710,000	〃	〃
	12-16-2-17104-00		960,000	〃	〃
	12-16-2-17088-00		1,460,000	〃	〃
	12-16-2-17084-00		444,000	〃	〃
	12-16-2-17081-00		960,000	〃	〃
	12-16-2-17077-00		407,000	〃	〃
	12-16-2-17076-00		960,000	〃	〃
	12-16-2-17079-00		1,460,000	〃	〃
	12-16-2-17096-00	유환아이텍 ㈜	4,037,000	〃	〃
	12-16-2-17080-00		2,970,000	〃	〃
	12-16-2-17082-00		2,970,000	〃	〃
	12-16-2-17100-00	㈜케빅	276,000	〃	〃
	12-16-2-17085-00		92,000	〃	〃
	12-16-2-17078-00		92,000	〃	〃

□ 납품기한 연기 귀책소재 : 도시기반시설본부

□ 지체상금 부과여부 : 미부과

4		조치계획

□ 선행공정(건축,전기,통신) 지연에 따라 납품(설치)시기가 미도래하고

□ 건설사업관리기술단 검토보고 한 내용이 적정하다고 판단되어 현장여건에 맞추어 관급자재 납품기한을 연장하고자 함

따로 붙임 :  관급자재 납품기한 연장 관련 문서  각 1부. 끝.