문서번호	시설보수과-641
결재일자	2017.2.13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		시설보수과장	성동도로사업소장
최태석		박춘배	02/13 이종엽
협 조

2017년 도로시설물 자체정밀점검 시행 계획

〔외부전문가  합동〕

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 2.

성동도로사업소

(시설보수과)

2017년 도로시설물 자체정밀점검 시행 계획

2017년 정밀점검용역 대상 도로시설물 중 기술용역타당성 심의결과 자체 정밀점검으로 시행토록 통보된 면목천복개구조물 등 17개 도로시설물에 대하여  외부전문가와 합동으로 내실있는 안전점검을 실시하고자 함

Ⅰ		관 련 근 거

기술용역 발주기관 자체 시행 기준(행정2부시장 제10058호, 2011.07.08.)

도로시설물 자체정밀점검 시행계획 통보(도로시설과-109909, 2011.09.08.)

기술용역 타당성 심사결과 통보(기술심사담당관-18341,18354호, 2016.10.27.)

Ⅱ		점검대상 시설물

시설물 현황

구 분	시설수	일반교량	고가차도	터널	지하차도	하천복개	비고
합 계	17	14	1		1	1
1 종	1					1
2 종
법정외	16	14	1		1

세부현황(17개소)

시설수	일반교량	고가차도	지하차도	하천복개	비고
	법정외	법정외	법정외	1종
17	안암교, 종암교, 서울숲다리교, 용두교, 제기제1교, 제기제2교, 전농교, 동진교, 용두4교, 고산자교, 무학교, 정릉천교, 황학교, 두물다리(청)	신답고가차도	성동지하차도	면목천 복개구조물

담당별 시설물 현황

연번	조별	시 설 명	종별	등급	준공 년도	규 모(m)		구조 형식	설계 하중	시설물 담 당
						폭	연장
1	1조	면목천복개구조물	1종	B	1991	15.5~25.0	1,900	-	-	최태석
2	2조	안암교	법정외	B	1965	30.0	27	RCS	DB-18	최태석
3		종암교	법정외	B	1967	25.0	54	PSCI	DB-18	최태석
4		서울숲다리교	법정외	B	2005	27.0	40	STB	DB-24	최태석
5		신답고가차도	법정외	B	1978	15.0	20	RA	DB-18	최태석
6	3조	용두교	법정외	B	1965	27.4	45	RA	DB-18	양지웅
7		제기제1교	법정외	B	1970	26.5	50	RA	DB-18	양지웅
8		제기제2교	법정외	B	1967	30.0	54	PSCI	DB-24	양지웅
9	4조	전농교	법정외	B	1975	48.0	36	PSCI	DB-24	이경수
10		동진교	법정외	B	1971	31.0	20	RCS	DB-18	양지웅
11		용두4교	법정외	B	1971	32.0	46	PSCI	DB-18	양지웅
12	5조	고산자교	법정외	B	2005	43.2	88	PSCS.RA	DB-24	정용재
13		무학교	법정외	B	2005	34.8	44	SPG	DB-24	정용재
14		정릉천교	법정외	B	2005	16.5	67	SPG	DB-24	정용재
15		황학교	법정외	B	2005	30.6	45	SPG	DB-24	정용재
16		두물다리(청)	법정외	B	2005	3.0~8.0	44	CS	DB-24	정용재
17		성동지하차도	법정외	B	1978	10.0	95	RCB	-	정용재

Ⅲ		시 행 방 법

정밀점검 : 2017.02.21. ~ 05.31.(100일간)

※ 세부 추진일정은 외부전문가의 자체점검 일정계획서 제출에 의함

점검방법

○ 지정된 시설물 점검 수행자(담당자)와 외부전문가 합동으로 정밀한 점검 시행

○ 정기점검보다 비교적 정밀하고, 정밀점검보다는 다소 범위를 축소하여 시설물 유지관리상 중요한 부분에 대하여 육안검사와 간단한 측정기구 활용하여 점검

- 특급기술자 : 외관조사 및 구조적인 결함상태 체크 및 시설물의 상태평가

- 중급기술자 : 외관조사, 현장시험 결과분석, 용역보고서, 외관망도 작성

점검조 편성

○ 점검 책임자 : 책임기술자(특급기술자)

○ 점검 인원   : 19인

- 담당수행자 4인(외부전문가 점검 이행여부 확인 및 합동점검)

- 외부전문가 5개조 각 3인(특급기술자 1인, 중급기술자 2인 구성)

○ 외부전문가 합동편성 현황

구분	대상시설물	수행자 (담 당)	외부전문가		비 고
			특급기술자	중급기술자
계	17개 시설물	4인	5인	10인
1조	면목천복개구조물	최태석	조만천	서범석. 조재민	(재)한국재난연구원
2조	안암교 종암교 서울숲다리교 신답고가차도	최태석	권준희	양승이. 정지운	(주)아워브레인
3조	용두교 제기제1교 제기제2교	최태석 (양지웅)	최진선	고삼암. 이기종	(주)한맥기술
4조	전농교 동진교 용두4교	이경수 (양지웅)	심상철	윤병규. 임영준	백양엔지니어링(주)
5조	고산자교 무학교 정릉천교 황학교 두물다리(청) 성동지하차도	정용재	김민수	이현석. 윤태성	㈜한국구조안전기술원

Ⅳ		외부전문가 선정

외부전문가 선정 기준

○ 안전점검의 전문성 확보 및 점검능력에 맞는 경험과 자격을 고려하여 선정

○ 시설물의 정밀점검 및 정밀안전진단 경험이 있는 기술자로 선정

○ 점검수준의 향상을 위해 특급기술자 중심의 동일회사 직원으로 선정

※ 외부전문가 자격 및 주요경력 : 별첨 참조

Ⅴ		점검비용 산정내역

외부전문가 소요 인력 및 비용

○ 인원산정 : 시설물별 정밀점검 인력(안전점검 및 정밀안전진단 대가 기준)

○ 기술자 등급별 투입율 : 1종 및 법정외(특급기술자 33%, 중급기술자 67%)

○ 자문수당 : 외부전문위원 100,000원 × 3인 × 1회

시설물별 전문가 점검인원 및 점검비 : 17개소, 531인(특급 168인, 중급 363인)

구분	시설물명	점검인원(명)	점 검 비 용(천원)
			합계	인건비	인쇄비	자문수당
합계	17개소	531인	121,022	115,782	3,740	1,500
1조	면목천복개구조물	94인 (특급 31인, 중급 63인)	21,112	20,592	220	300
2조	안암교 등 4개소	122인 (특급 39인, 중급 83인)	27,812	26,632	880	300
3조	용두교 등 3개소	87인 (특급 27인, 중급 60인)	19,890	18,930	660	300
4조	전농교 등 3개소	91인 (특급 29인, 중급 62인)	20,818	19,858	660	300
5조	고산자교 등 6개소	137인 (특급 42인, 중급 95인)	31,390	29,770	1,320	300

※ 시설물별 소요인원 및 대가 산출서 : 별첨

Ⅵ		세부추진계획

추진개요

○ 점검대상 : 면목천복개구조물 등 17개 시설물

○ 점검기간 : 2017.02.21. ~ 05.31.(100일간)

○ 소요예산 : 121,022천원(인건비 115,782천원, 인쇄비 3,740천원, 자문비 1,500천원)

○ 점검인원 : 19인(외부전문가 15인, 업무수행자 4인)

과업범위

○ 자료수집 및 분석

○ 주요부재의 외관조사 및 현장시험

○ 외관조사 결과분석 및 상태평가(부재별, 시설물 전체)

○ 외관조사망도 및 정밀점검 보고서 작성

※ 자체정밀점검 및 정밀점검 보고서 작성

○ 점검일정 : 외부전문가가 현장점검 세부 점검일정 계획, 장비운영 및 교통처리계획을 사업소 시설물 담당자와 협의 제출

추진일정

○ 2017. 2월 : 각 조별 참여기술자 점검요령 등 교육 및 과업수행계획서 제출

○ 2017. 3월 : 착수보고

○ 2017. 4월 : 자체정밀점검 중간보고

○ 2017. 5월 : 자체정밀점검 결과 최종보고(필요시 자문회의)

○ 2017. 6월 : 자체정밀점검 점검비 지급 및 시스템 입력

Ⅶ		행 정 사 항

소요예산 현황

○ 2017예산 : 121,022천원(인건비 115,782천원, 인쇄비 3,740천원, 자문비 1,500천원)

○ 예산과목 :

- 도로시설과, 도로시설관리, 도로시설물운영, 시설물 안전점검 및 진단, 시설비

- 교량안전과, 교량관리, 교량시설물 점검관리, 교량시설물 안전점검 및 진단, 시설비

정밀점검 수행 담당자(조별)는 과업수행에 필요한 세부 점검일정, 장비운영 및 교통처리계획 등을 외부전문가와 협의하여 결정하고, 추가 과업수행(염화물 함유량, 철근탐사, 코어채취 등) 필요 시 방침 수립 후 별도 비용 지급

각 조별 책임기술자 점검요령 등 교육실시

자체정밀점검 완료 후 도로관리시스템 및 FMS에 입력

외부전문가 수당 및 소요비용은 점검(최종) 완료 보고 후 지급(소득세 공제)

붙임   1. 자체정밀점검 과업범위 및 보고서 작성 1부.

2. 자체정밀점검 소요인원 및 비용산정 대가 내역 1부.

3. 자체정밀점검 외부전문가 명단(주요경력) 1부.

4. 자체정밀점검 일보, 주보, 월보 보고양식 1부.

5. 참고자료(2012년 자체정밀점검 방침서-도로시설과) 1부. 끝.