문서번호	토목부-2954
결재일자	2017.2.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	교량건설과장	토목부장		시설국장
권순환	박용택	김영수		전결 02/13 형태경
협 조
	안전관리과장		호경수

- 천호대로(광나루역) 확장공사 -

파형강판 안전 시공관리 TF팀 구성 및 운영계획

2017. 2.

도시기반시설본부

(토목부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■

- 천호대로(광나루역) 확장공사 -

파형강판 안전 시공관리 TF팀 구성 및 운영계획

파형강판 구조물의 안전시공을 위한 자문결과 및 대한토목학회 연구결과에 따라 시공 및 공용 중 안정성을 확보하기 위하여 T/F팀을 구성 및 운영코져 함.

※ 파형강판 시공 중 “중점관리 공사장”으로 관리

1		사업개요

○ 공 사 명 : 천호대로(광나루역) 확장공사

○ 규    모 :

- 도로확장 : 폭 6 → 10차로,  연장 900m(지하차로 580m 포함)

○ 공사기간 : ’10.10.11 ∼’17.12.31

○ 계약금액 : 전체 45,480백만원

○ 시 공 사 : 해동건설㈜ 외 1개사

○ 감 리 사 : ㈜ 수성엔지니어링

2		목 적

□ 파형강판 시공 및 공용 중 안정성 확보

○ 대한토목학회에 “파형강판 구조물 안전성 평가 및 대안검토”  및

총괄건설정책자문(2회)을 통해 최종 보강(안) 확정

- 당초 : 파형강판 + SB-1 뒤채움재

- 최종 보강(안) : 파형강판 + 라이닝(t=650㎜)

□ 시공 단계별 현장 중점관리 및 기술자문

○ 파형강판 시공 중 “중점관리 공사장”으로 관리

○ 시공 중 안정성 확보를 위한 기술자문

○ 시방기준 적정성 확인

○ 계측관리에 대한 기술자문

2		T/F팀 구성 및 운영

□ “파형강판 안전 시공관리 TF팀” 구성 및 운영

○ 운영기간 : ‘17.02.15 ∼ ‘17.11.15(파형강판 상부 성토완료시 까지)

○ 운영횟수 : 12회

- 파형강판 설치 완료시 까지(3개월 소요) : 월 2회

- 파형강판 라이닝 콘크리트 시공 및 되메우기 까지(6개월 소요) : 월 1회

○ 운영회의 장소 : 현장사무소 상황실(필요시 본부 회의실)

○ 구    성 : 총 10명 (위원장 1, 위원 9)

구 분	소 속	직위 및 담당분야	성 명
위원장	도시기반시설본부 토목부	부장	김 영 수
위 원	도시기반시설본부 토목부	교량건설과장	박 용 택
위 원	도시기반시설본부 안전관리과	구조기술사	정 달 영
위 원	도시기반시설본부 안전관리과	토질 및 기초 공학박사	정 진 혁
위 원	㈜대한콘설탄트	구조분야 (실시설계 및 보강설계 참여자)	박 기 철
위 원	평산에스아이㈜	파형강판 자재업체 담당 차장	황 성 묵
위 원	㈜수성엔지니어링	구조기술사 (기술지원 건설사업관리기술자)	변 윤 주
위 원	㈜수성엔지니어링	토질 및 기초 기술사 (기술지원 건설사업관리기술자)	김 성 인
위 원	㈜수성엔지니어링	감리단장	정 하 설
위 원	대보건설㈜	현장대리인	유 의 종

※ 자문비는 해당없음(공무원 및 사업관련 업체 임직원으로 구성되어 있음)

3		향후계획

□  추진일정

○ ‘17. 2월 ~   5월 : 1차 ~  6차 TF팀 회의 개최(월 2회)

○ ‘17. 6월 ~ 11월 : 7차 ~ 12차 TF팀 회의 개최(월 1회).  끝.