투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	강서도로사업소
수신	기전과장
(경유)
제목	공사변경계약체결통보(자전거전용차로 통행위반 단속운영관련 교통안전시설물(표지)설치공사)

1. 기전과-1872(2017.2.9)호와 관련입니다.

2. 다음의 사업에 대하여 아래와 같이 변경계약 체결되었으니 참고하시기 바라며, 아울러 준공기한내 준공신고를 제출토록 하여 지연배상금이 부과되는 일이 없도록 업체에 안내하여 주시기 바랍니다.

가. 계약건명 : 자전거전용차로 통행위반 단속운영관련 교통안전시설물(표지) 설치공사

나. 계약업체 : ㈜부화산업 (대표: 이응열)

다. 변경계약체결일 : 2017.2.13.

라. 변경사항

계약금액변경	당 초	금4,049,910원
	변경후	금3,950,000원
	증․감액	감99,910원
계약기간	당 초	2016.12.20. ～ 2017.2.17
	변경후	2016.12.20. ～ 2017.2.17
비 고	-

붙 임 : 변경계약서 1부. 끝.

	관리단속과장
주무관	정안숙		관리단속과장	02/13 이희천
협조자	주무관	김태식
시행	관리단속과-1749	(		)	접수		(		)
우	07520	서울특별시 강서구 양천로 237(마곡동, 강서도로사업소)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2657-7919	/전송	02)2657-7950	/		/	부분공개(7)