문서번호	건축부-2464
결재일자	2017.2.13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		환경시설과장	건축부장
김찬유		유현수	02/13 김진용
협 조

『재사용플라자 건립공사』

건설폐기물처리용역 총차 및 2차 변경계약 검토 보고

2017. 2.

도시기반시설본부

(건 축 부)

『재사용플라자 건립공사』

건설폐기물처리용역 총차 및 2차 변경계약 검토 보고

『재사용플라자 건립공사』와 관련하여 건설폐기물처리용역 총차 및 2차에 대한 변경계약이 필요하여 검토 보고함

1		용역개요

용 역 명 : 재사용플라자 건립공사 건설폐기물처리용역

위    치 : 성동구 용답동 205-1번지외 5필지 일대

규    모 : 지하2층/지상5층, 연면적 16,529㎡

용    도 : 폐기물처리시설(재활용시설)

용역기간 : (총차) 2015.  2. 24 ~ 2017. 3. 15

(2차) 2015. 11.   1 ~ 2017. 3. 15

용 역 비 : (총차) 1,160.478,000원

(2차)    182,228,000원

용 역 사 : ㈜백산이엔티건설, ㈜한진건설

건설사업관리용역사 : 펨코엔지니어링, 아이티엠코퍼레이션

현공정률 : 89%

2		총차 및 2차 계약변경 검토

관련근거 : PC17-093호(2017.02.09)호

변경사유 : 조경식재지 토양불량으로 토양치환에 따른 건설폐토석 1,786.74㎡                   물량 증가 실정보고 승인(방재시설부-2108호, ‘17. 2. 8)

- 방재시설부-2031(‘17. 2. 7)호에 의거 조경식재지 토양 폐기물처리는 건축부          에서 발주한 건설폐기물처리 용역에 포함하여 시행 방침

총차 및 2차 계약 변경내용

(단위: 원)

구 분	계 약 금 액			비 고
	변 경 전	변 경 후	증 감
총차	1,160,478,000	1,224,660,000	증 64,182,000	계약기간변경없음
2차	182,228,000	246,410,000	증 64,182,000

3		감리자 검토의견

조경식재지 토양불량으로 인한 폐토석에 대해 적법하게 처리될 수 있도록 건설폐기물처리용역 총차 및 2차 변경계약은 적정하다고 판단됨

4		처리의견

조경식재지 토양불량으로 토양치환(건설폐토석 1,786.74㎡ 물량 증가) 실정보고 승인과 관련 건설폐기물처리용역 총차 및 2차 변경계약을 추진코자 함

5		향후 추진계획

2017. 2월 : 총차 및 2차 변경계약

2017. 3월 : 건설폐기물처리용역 준공

붙 임  건설폐기물처리용역 총차 및 2차 변경계약 요청(펨코엔지니어링) 1부.  끝.