문서번호	시설관리과-2944
결재일자	2017.2.13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장	강서수도사업소장
황민욱	문용욱	代김근용	02/13 이인걸

『목동배수지외 10개소 무인경비용역』

설계변경 계획 보고

2017. 2.

강서수도사업소

(시설관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

『목동배수지외 10개소 무인경비용역』

설계변경 계획 보고

『목동배수지외 10개소 무인경비용역』와 관련하여 성아배수지 운영중단(폐쇄)되어 성아배수지를 무인경비용역에서 제외하고 설계변경하고자 함.

관련근거

성아배수지 운영중단(폐쇄)에 따른 기전설비 조치계획(시설관리과-991, ‘17.1.13.)

목동배수지외 10개소 무인경비용역 일부중지 요청(시설관리과-1231, ‘17.1.17.)

용역계약현황

용 역 명 : 목동배수지외 10개소 무인경비용역

계약금액 : ****************************

계 약 자 : *************

용역기간 : 2014. 3. 15. ~ 2017. 3. 14.

대    상 : 목동배수지외 11개소

용역설계변경 내역

변경사유 : 성아배수지 운영중단(폐쇄)에 따른 성아배수지 무인경비용역에서 제외

차수별 계약금액 조정

[단위 : 원]

구분		당초	변경	증·감	비고
총부기금액		**********	**********	*********
년도별	1차수(2014년)	**********	**********	*
	2차수(2015년)	**********	**********	*
	3차수(2016년)	**********	**********	*
	4차수(2017년)	*********	*********	*********

행정사항

사업소 자체 설계변경 심의위원회를 개최하여 4차수(2017년) 및 총부기 계약금액 변경에 대하여 타당성 여부를 심의 후 용역 설계변경 시행.

붙임 1.설계변경 내역서 1부.

2.관련 방침서 각 1부.  끝.