문서번호	도시철도설비부-1825
결재일자	2017.2.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정보통신과장	도시철도설비부장
배종수		추경수	02/13 정찬웅
협 조

『9호선 연장건설(3단계)』정보통신분야 공정회의(01월, 5차) 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 02.

9호선연장건설(3단계) 정보통신분야 공정회의(5차) 결과보고

9호선 연장건설 정보통신분야  현장시공 및  시스템에 대한  공정추진 현황 과 현안사항에 대하여 공정회의를 개최하고  보고드림

‘’

						회의 개요

□ 회의개요

○ 일  시 : 2017. 02. 09(목)  14:00 ~ 15:30

○ 장  소 : 시스템분야 감리단 상황실

○ 안  건

- 추진공정현황 및 추진계획

- 시스템별 현안사항

○ 참석자 : 12명

- 본부(3명), 시스템 감리단(2명), 시공사(1명),서울메트로9호선운영(1명),현대정보(1명), 아트웨어(안내게시기 1명), 아큐픽스(전송설비 1명), 디라직(방송설비 1명), 국제텔레시스(배선반,1명)

□ 계약현황

구 분		계약업체/관련업체		대표자	계약일자	착수일자	준공(납품)일
정보통신설비공사		일광기업(주)		오도진	‘14.12.31	‘15.01.13	‘18.01.11
관급장비	1) 주전송설비	현대정보기술(주)	(주)아큐픽스	마용득	‘13.03.20	‘13.04.02	‘18.12.31
	2) 열차무선설비		㈜리노스
	3) 종합무선중계설비		아함전자(주)
	4) 교환및관제전화설비		(주)코바다
	5) 정거장영상설비		송림기술(주)
	6) 대열차공간화상설비		한국후지쯔(주)
	7) 행선안내게시기설비		(주)아트웨어
	8) 종합집중관리설비		(주)코바다
	9) 경영정보시스템		(주)에이티에스아이테크
	10) 자동요금징수설비	㈜LG CNS		김영섭	‘13.06.20	‘13.07.09
	11) 자동방송설비	(주)디라직		박성기	‘13.04.15	‘13.05.23
	12) 무정전전원장치(UPS)	(주)크로마아이티		박윤서	‘13.05.13	‘13.06.28
	13) 배선반	국제텔레시스(주)		박병헌	‘13.03.27	‘13.04.25

□ 추진현황

▣ 1구간 정보통신설비공사

○ 01월 공정현황 : 계획 14.38% , 실적21.79%(대비 151.58%)

○ 추진사항

위 치	공 종	단위	설계량	금월(17.01.01 ~17 01. 31)			누계(17.01.31현재)		계획 (17.02.01 ~02.28)	완 료 예정일
				계획	실적	대비 (%)	실적	공정율 (%)
본 선	케이블트레이	M	7,278				4,500	61.8%		‘17.06
	누설동축케이블	M	8,761	세트앙카 작업			3,355	44.4%	3,500	‘17.06
	광섬유 케이블	M	32,439				23,172	71.4%		‘17.12
	동 케이블	M	5,767							‘17.12
정거장	전선관	M	37,188		300		1,800	5%	1,000	‘17.12
	케이블, 전선	M	158,419							‘17.12
	콜폰,인터폰, 음성유도기	개	268							‘17.12
	방송스피커	개	500							‘17.12
	복합통신안테나	개	25							‘17.12
	출입통제설비	식	4							‘17.12

▣ 2구간 정보통신설비공사

○ 01월 공정현황 : 계획 14.92% , 실적35.77%(대비 239.75%)

○ 추진사항

위 치	공 종	단위	설계량	금월(17.01.01 ~17 01. 31)			누계(17.01.31현재)		계획 (17.02.01 ~02.28)	완 료 예정일
				계획	실적	대비 (%)	실적	공정율 (%)
본 선	케이블트레이	M	11,204				11,204	99.9%		‘17.06
	누설동축케이블	M	10,192				10,192	99.9%		‘17.06
	광섬유 케이블	M	10,980							‘17.12
	동 케이블	M	7,671							‘17.12
정거장	전선관	M	31,247				4,000	12%	2,000	‘17.12
	케이블, 전선	M	158,941							‘17.12
	콜폰,인터폰, 음성유도기	개	244							‘17.12
	방송스피커	개	500							‘17.12
	복합통신안테나	개	19							‘17.12
	출입통제설비	식	4							‘17.12

						추진실적 및 계획

□ 주요추진사항

구 분	전 월 (01월) 실적	금 월 (02월) 계획
1) 1,2구간 공통사항	○ 935특화정거장 시범추진회의(01.06) - 14:00, 서울시 10층 회의실 - 실시설계 및 사업비 검토 ○ 정보통신 감리원 추가투입(01.09) - 보조감리원 오원균(중급) ○ 3단계 이동통신 관계자회의(01.11) - 공사현황, 도면, 연락처 등 정보제공 - 이통사 소비전력 현황 공구 통보 ○ 열차무선용 GPS안테나 설치장소 변경 요청(01.11) - 기지국(937)에 설치되어야 하나 936 정거장에 설계, 시공사에 변경 요청 ○ 935정거장 역무실 개구부 업무협의(01.16) - 역무실 구조변경으로 개구부 위치 노출 - 참석자 : 건축감리 및 시공사 담당자 - 건축 : 당초 역무실외부 설계(통신과 건축 도면 상이), 건축과 무관 ○ 메트로 9호선운영사 업무협의(.01.17) - 931정거장 운영사 소요회선 협의 - UTP케이블 74회선 - 광케이블 40Core ○ 전기분야 인터페이스회의 참석(01.18) - 감리단상황실, 3단계공구 전기감리 및 시공사 참석 - RTU(PIT) 도면 조속 제공 요청 ○ 출입통제설비 현장실정보고 검토(.01.23) - 공사금액 : 338, 446,000원 ○ 이동통신 소비전력현황 송부(01.31) - 설계용량(약40K) 대비 요구 전력(약100K) 과다로 설계변경 필요	○ 935정거장 특화관련 현장실정보고 - 대합실 한정 특화 추진에 따른 사업비 실정보고 ○ 출입통제설비 현장실정보고서 보완 요청(.02.02) - 승강장 축소분 감액 등 수정 ○ 출입통제설비 현장실정보고서 검토 보고 - 승강장 축소분 감액 등 수정 ○ 이동통신 소비전력 공구 검토의견 접수(02.07) ○ 현장실정보고 - 누설동축케이블(4D), 음성유도기 등 1건 보고 ○ 물가변동으로 인한(2차) 계약금액조정 검토 보고 - ESC 보고서 접수(02.06) - 1구간 : 148,424,000원(‘16.10.31, 조정율 3.02%) - 2구간 : 120,157,000원(‘16.11.30, 조정율 3.21%)
2) 1구간 정보통신 공사	○ 현장시공 <본선통신공사> - 932~934 열차무선케이블(42D) 포설작업(야간) <정거장통신공사> - 931정거장 대합실, 승강장 배관 - 앙카천공, C찬넬 및 배관 작업 ㆍ 일반통신, 자동방송, 화상설비 배관 ㆍ 변전, 전기실 단자함 매입작업 및 배관	○ 현장시공 <본선통신공사> - 932~934 열차무선케이블(42D) 포설작업(야간) <정거장통신공사> - 931정거장, 승강장 배관 - 앙카천공, C찬넬 및 배관 작업 ㆍ 일반통신, 자동방송, 화상설비 배관 ○ 3차공사 계약 요청(02.06) - 금액 : 4,386,476,800원 - 기간 : 계약일~2018.01.11.

구 분	전 월 (01월) 실적	금 월 (02월) 계획
3) 2구간 정보통신 공사	○ 현장시공 <정거장통신공사> - 936 정거장 대합실, 기능실 - 단자외함 및 박스 매입 작업 - 트레이 취부, 벽부배관 작업 - 일반통신, 자동방송, 화상설비 배관작업 (937정거장) - 일반통신, 자동방송, 화상설비 배관점검 ○ 920 본선 가설전등 위치이동 협조 요청(01.20): 열차무선케이블 위치설치	○ 현장시공 <정거장통신공사> - 937정거장 ㆍ일반통신,자동방송, 화상설비 배관 - 938정거장 ㆍ일반통신,자동방송, 화상설비 배관
4) 정보 통신설비	○ 현대정보기술 TDI 현장실사 결과 협의(01.23) - TDI수량 2개 부족(933환승, 938 대합실) - 승강장 계단 TDI용 전원선 및 광코어 추가소요 : 기설 회선에서 분기 사용	○ 제작사양서 검토, 승인 - 주전송, 열차무선설비 제작사양서 접수(02.01)
5) 자동 방송설비		○ 제작사양서 검토
6) 무정전 전원장치	○ 3단계용 제작사양서 접수, 검토(01.31) - UPS : 2단계 사양과 동일 - BAT 밀폐형(2단계)→반밀폐형(IBT)검토 · 3단계(15/20K)크기 : 2,900(W)x900(D)x2,250(H) · 2단계(20K) 크기 : 3,300(W)x800(D)x1,600(H)	○ 무정전전원장치(2차) 계약 요청(02.06) - 금액 : 658,355,580월 - 기간 : 계약일~2018.12.31 ○ 제작사양서 검토, 승인 - UPS : 2단계 제품과 동일 - BAT : 반밀폐형(IBT사 제품, 2단계 밀폐형)
8) 배선반		○ 제작사양서 검토

						개 별 안 건

□ 정거장 통신분야

▣  이동통신사 요구 소비전력(110KVA)은 타당성을 세밀하게 분석, 반영

▣  TDI 수량 부족 문제 차후 처리방향 검토

※섬식의 경우 1대에 상하선 노선도 통합적용 검토

▣  전산실, NMS실 회선 요구(서울메트로운영(주))

○ 931정거장에 신설되는 전산실, NMS실에 9호선 2,3단계 운용을 위한   통신회선(UTP 74P, 광 40CORE 이상)신설 요청

▣  승강장 축소관련  출입통제설비(건축분야 예산반영건)

○ 935특성화 시범사업과 별도로  조속히 보고요함

(실정보고 → 도철설비부 → 건축부 협조요청)

▣  종합공정 및  시운전 시기를 감안, 관급장비 공장검수(7~8월) 등 차질없이 추진

▣  화장실 콜폰을 측면에 설치할 경우 슬림화를 위한 공통회로 적용방안은 추후 검토

□ 시공 안전 및 기타

▣  경기불황으로 예산 조기 집행 필요하므로 작업 진도를 가속화하여 조기 기성 신청

▣  안전관리계획서에 의거 안전사고 예방에 만전을 기할것

▣  겨울철 안전사고 대비 철저

						향후 추진사항

▣ 1구간 정보통신공사(3차) 계약  : ‘17.02월 중

▣ 3단계 무정전전원장치(2차)계약 : ‘17.02월 중

▣ 정보통신물품 제작사양 승인 검토

- 주전송설비, 열차무선설비, 방송설비 등

붙임 : 02월 공정회의 결과(감리단) 보고. 끝.