문서번호	도시철도설비부-1879
결재일자	2017.2.14.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설전기과장	도시철도설비부장
황영필		서태창	02/14 정찬웅
협조

서울지하철 9호선3단계 921공구

전기분야  보감리원 투입검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 2

도시기반시설본부

(도시철도설비부)

『서울지하철 9호선3단계 921공구』

전기분야 상주감리원 투입검토 보고

『서울지하철 9호선3단계 921공구 건설공사』전기분야 상주감리원 추가투입요청에 대하여 검토한 결과를 보고드림.

[관련근거 : ㈜유신감리17-82호(2017.1.25), ㈜유신감리17-88호(2017.2.14)

감리용역 개요

용 역 명 : 서울지하철 9호선3단계 921공구 건설공사 전면책임감리용역

용역기간 : 2009. 11. 18. ~ 2018. 12. 31

(8차 : 2017. 1. 1 ~ 2017. 12. 31)

계약금액 : *****백만원(전기 ***백만원)

감리현황

[단위 : 인․월]

분야별	토 목	전 기	건 축	기 계	소 방	비고
업체명	㈜유신		㈜태원		㈜한국소방
분담률(%)	****	****	****	*****	****
감리원수 (감리사기준)	*******	******	****	****	**

***********************************************************

공사추진 현황

공정율 (계획/실적)	본 선	정거장		비고
		935정거장	936정거장
66.6/66.4	· 터널 구조물 완료 · 본선환기구(3개소) 본체구조물 공사중(70%)	· 본체 구조물 완료 · 출입구(4개소), 환기구 부대공사 진행중(40% 진행)	· 구조물 공사 진행중(85% 진행)

감리원(전기) 투입 승인 검토

전기분야 상주감리원 배치기준(입찰공고 제2009-8호, 2009.10.13)

- 자격등급 : 고급 1명, 중급 1명

- 평가여부 : 미평가

감리원 등급 및 경력

성 명	생년월일	등 급	경 력	비 고
***	********	**	21년 3월	기 승인
***	********	**	18년 11월	추가 투입

투입계획

배치등급		환산감리원 수	배치기간	비고
최태진	중급	5.520÷0.736= 7.5(인‧월)	2016.6.25～2017.02.14
	고급	18.675÷0.830=22.5(인‧월)	2017.2.15～2018.12.31
이진환	중급	16.521÷0.736=22.5(인·월)	2017.2.15～2018.12.26

※ 배치등급 : 중급이상(전력기술관리법 시행령 22조)

※ 배치기간 : 공사가 시작되는 날부터 끝나는 날까지(전력기술관리법 25조 6항)

검토자 의견

투입예정 감리원의 경력을 검토한바, 서울지하철 7-3공구 감리경력과 인천도시철도 1호선 굴현정거장 실시설계 경력 등 총 18년 11개월의 전력기술 경력자로서,

921공구 전기분야 감리자로서의 업무 수행에 적합한자로 판단되므로, 상기 투입계획과 같이 2017. 2. 15일자 투입을 승인하고자 합니다.  끝.