문서번호	인터넷통신과-677
결재일자	2017.2.15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		인터넷통신과장	데이터센터소장
전성권		황기원	02/15 이계헌
협조
	정보자원운영과장		代류은희

2017년 정보자원 통합인프라 구축 사업 -

사업부서 업무담당자 회의 결과 보고

2017. 2.

데이터센터

(인터넷통신과)

- 2017년 정보자원 통합인프라 구축 사업 -

사업부서 업무담당자 회의 결과 보고

『2017년 정보자원 통합인프라 구축』사업관련 사업부서의 업무담당자 회의를 개최하고 그 결과를 보고드림.

1		회의 개요

□ 일  시 : 2017. 2.10(금)  15:00 ~ 16:00

□ 장  소 : 데이터센터 4층 회의실

□ 안  건

◯ “2017년 정보자원 통합인프라 구축” 세부 추진 계획 일정 안내

◯ 부서별 사업추진 현황 파악 및 센터 서버 담당자 소개

◯ 자원통합사업 관련 업무협의(도입물량 및 사양 변경) 등

□ 참석자 : 총 38명

◯ 사업부서 : 25명

- 정보기획관

· 정보기획담당관(정우석), 정보시스템담당관(이창한, 김연숙, 최성수, 김윤수, 김지용), 공간정보담당관(권경화, 최세원)

- 실·국·사업소

· 보건의료정책과(조수경, 박선아, 김화실), 정보공개정책과(송정아, 원종관), 세무과(여성연, 박경여), 공원녹지정책과(윤정환), 하천관리과(곽민철), 기술심사담당관(윤희태), 인재개발원(이철), 경제정책과(조동호), 서울도서관(김영기, 안치상), 물재생계획과(노주원), 박물관과(이루리), 문화정책과(이현)

◯ 데이터센터 : 13명

- 정보자원운영과

· 임연주, 전인탁, 김용수, 박화진, 조수현, 고동수, 이재구, 엄태정

- 인터넷통신과

· 전성권, 조동찬, 최영헌, 박종호, 조양수

2		회의 내용

□ 주요내용

◯ 자원통합사업관련 일정 안내

- 업무부서 협의 완료 : 2017. 2.17(금) ~ 2. 20(월)

- 자원통합사업관련 장비(서버, 스토리지, 스위치 등) 입고 일정(예정)

⇒ 유닉스/블레이드/단독서버 : 2017. 7~8월 장비 입고 예정

※ AP개발 및 이관 준비가 완료된 부서를 우선하여 IT인프라 제공

⇒ 가상화서버 : 정보자원 통합사업사업 일정에 관계없이 추진 가능

(사업부서 서버 요청시 2주안에 제공)

◯ 자원통합사업관련 업무담당자 안내

- 사업추진에 대한 세부사항 등은 과/팀별 업무담당자를 통해 협의

· 정보자원운영과

⇒ 내부행정 : 임연주, 김용수, 전인탁, 박화진, 조수현

⇒ 민원행정 : 송상봉, 고동수, 이재구, 업태정

· 인터넷통신과

⇒ 인터넷팀 : 최재욱, 최영헌, 조동찬, 박종호, 조양수

□ 진행사진

◯ 사업부서 업무담당자 회의 진행사진

붙 임 : 1. 정보자원 통합인프라 구축 사업 목록 1부.

2. 세부 추진 일정 1부.

3. 참석자 명단 1부.  끝.