문서번호	정수시설과-183
결재일자	2014.3.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	구의아리수정수센터소장
노성제		박심근	03/26 오세영
협 조
	주무관			이무규

2014년 정수장 전기시설물

유지보수 정비공사(연간단가) 발주계획

2014. 3.

구의아리수정수센터

(정수시설과)

2014년 정수장 전기시설물

유지보수 정비공사(연간단가) 발주계획

우리 정수센터 전기설비의 효율적인 유지보수를 위한 공사(연간단가)를 아래와 발주하여 정수처리시설 운영 및 전기설비 유지관리에 만전을 기하고자 함.

□ 관련근거

❍ 기전설비과-1175(2014.2.25.)호 『2014년도 기전설비 유지보수 연간단가계약 추진 계획 알림』

❍ 기전설비과-1315(2014.3.3.)호 『2014년도 상수도 기전설비 연간단가 일위대가(전기) 수정사항 통보』

□ 추진개요

❍ 추진기간 : 2014. 4. ~ 2014. 12. 31.

❍ 적용대상 : 정수센터 전기시설물

❍ 추진방법 : 추진계획 및 본부 설계지침에 의하여 시행

□ 추진방향

❍ 정수장 노후 전기설비 적기 정비 및 고장시 긴급 복구를 위한 보수공사를 연간단가 계약으로 발주하여,

❍ 수의계약 대상 건수 감축으로 업무처리의 투명성을 높이고,

❍ 전문 공사업체와의 연간 계약체결로 시설 유지관리의 효율성을 제고하고자 함.

□ 발주내역

❍ 낙뢰에 취약하고 고장시 파급효과가 큰 염소투입설비 현장제어반(1정수장용) 등 20개소 34면에 SPD(surge protective device, 서지보호기) 설치

❍ 탈수기동 등 기존 건물의 일반조명 102등을 고효율의 LED조명으로 교체

❍ 관사 49세대 노후 분전반 정비

❍ 기타 노후 전기설비 보수(정비) 1식.

※ 추가 보수사항(신규공종) 발생시 계약금액 내에서 선 작업지시 후 변경계약.

□ 발주방법

❍ 소요예산 : 49,720천원

❍ 예산과목 : 상수도사업비, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비, 기타교체비

❍ 계약방법 : 제한경쟁

- 입찰참가자격 : 전기공사업법에 의한 전기공사업 등록업체로서 주된 영업소의 소재지가 서울특별시에 있는 자.

- 계약기간 : 착공일로부터 2015. 3. 31.까지 (계속계약으로 업무 연속성 및  효율성 증대)

□ 추진일정

❍ 2013.  3. 28. : 공사발주(시행)

❍ 2013.  4. 15. : 계약 및 착공

❍ 2013. 12. 31. : 공사준공 및 대금지급

※ 작업은 작업지시서에 의하며, 계약상대자의 기성 청구시 작업완료보고서에 의하여 정산 및 기성금 지급.

붙임 : 원가계산서 1부.  끝.