투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제 목	「서울기록원 건립공사」 변경계약 의뢰

우리 본부에서 시행중인 「서울기록원 건립공사」에 대하여 아래와 같이 변경계약(1차공사)을 요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 서울기록원 건립공사

나. 공사기간 : 총차 : 2016. 4. 20 ~ 2018. 4. 19

1 차 : 2016. 4. 20 ~ 2017. 2. 19

다. 계약금액 : 14,256,200천원 (1차 : 4,345,000천원)

라. 계 약 자 : 신화종합건설(주), 슈프림종합건설주식회사

마. 계약변경 내용

구 분		변 경 전	변 경 후	비 고
공사기간	총차	2016.04.20 ~ 2018.04.20	2016.04.20 ~ 2018.04.20	변경없음
	1차	2016.04.20 ~ 2017.02.19	2016.02.19 ~ 2017.05.21	91일 연장
계약금액	총차	14,6256,200,000원	14,6256,200,000원	변경없음
	1차	4,345,000,000원	4,345,000,000원	변경없음

바. 예산과목 : 정보공개정책과, 정보관리강화, 기록물시설관리, 서울기록원건립, 시설비 및 부대비

붙임 : 1) 검토 보고서 1부.

2) 1차공사 계약기간 연장요청서 1부.

3) 준공기한연기의뢰서 1부.

4) 합의각서 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	송옥의		복지시설과장	조영수		건축부장	전결 02/14 김진용
협조자
시행	건축부-2545	(		)	접수		(		)
우			/	http://infra.seoul.go.kr
전화		/전송	02)3708-2659	/		/	부분공개(7)