문서번호	정수시설과-1516
결재일자	2017.2.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	영등포아리수정수센터소장
김진수		유영춘	02/14 이성락
협조

취․정수장 시설물 정밀안전진단용역 시행 계획

2017. 2

영등포아리수정수센터

취․정수장 시설물 정밀안전진단용역 시행 계획

시설물의 안전관리에 관한 특별법』에 의거 제1정수장 및 취수장 시설물 정밀안전진단용역을 실시하여 시설물의 물리적․기능적 결함 및 내재되어 있는 위험요인을 발견하고 이에 대한 적절한 조치를 취하기 위하여 구조적 안전성 및 결함 원인 등을 조사․측정․평가하고 적절한 보수․보강방법을 제시함으로써 시설물의 안전을 확보하고자 함

추진 근거

시설물의 안전관리에관한 특별법 제7조 및 같은법 시행령 제9조

○ 시설물의 안전관리에 관한 특별법에 의거 1종 시설물(1일 공급능력 3만톤

이상의 지방상수도)의 정밀안전진단은 완공 후 10년이 지난때부터 1년 이내에

실시하여야 하며, 그 이후에는 이전 정밀안전진단을 완료한 날을 기준으로

안전평가등급이 B등급은 5년에 1회 이상 실시

- 제1정수장 및 풍납취수장은 2012년 정밀안전진단 실시 후(안전평가등급B등급)

금년 5년 주기 도래

- 제2정수장은 2010년 준공된 시설로 제외(완공 후 10년이 지난때부터 1년이내 실시)

기용역 시행 현황

시설물명	시설물 구 분	준공년도	용역 시행현황			평가등급
			용역 종류	시행기간	용역비(천원)
제1정수장 및 취수장	1종	1992	정밀안전진단	2007.8.8~2007.12.21	97,807	종합평가 : B
제1정수장 및 취수장	1종	1992	정밀안전진단	2012.5.16~2012.12.26	122,450	종합평가 : B

용역  개요

용 역 명 : 영등포아리수정수센터 취․정수장 시설물 정밀안전진단용역

예 산 액 : 180백만원

예산과목 : 상수도사업비, 영업비용, 정수비, 일반운영비(사무관리비)

개   요 : 제1정수장 시설용량 30만㎥/일, 취수장 61만㎥/일, 도․송수관로

D=500mm~1,850mm, L=600m, 절토사면 H=50m, L=100m,

건축물 2,163㎡, 기타 부대시설 1식

계약 방법

입찰방법 : 일반공개경쟁입찰

입찰참가자격 : 시설물의 안전관리에 관한 특별법 제9조 및 동법시행령 제

11조 규정에 의거 수리시설분야 및 건축분야 안전진단전문기관으로

등록된 업체이며 국토교통부장관이 인정하는 수리시설분야

정밀안전진단교육을 이수한 책임기술자를 보유한업체

사업수행능력평가(PQ) 및 적격심사 대상임

- 근거 : 건설기술진흥법 시행규칙 제28조 제1항 〔별표2〕 (2016.08.12.)

정밀점검 및 정밀안전진단 용역업자의 사업수행능력 세부평가 기준

(국토해양부 고시 제2012.-705호 2012.10.17.)

서울특별시 기술용역 사업수행능력 세부평가기준

(기술심사담당관-11264 2016.6.30)

낙찰자 결정 방법

- 근거 : 지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준(행안부 예규 제39호,2016.1.11)

사업수행능력평가(35점)+지역업체참여도(3점)+경영상태(2점)+입찰가격(60점)+기술인력(△10)

향후 계획

본청 기술심사담당관에 타당성 심사요청(2017. 2월)

본청 기술심사담당관에 사업수행능력평가기준 심의 요청(2017. 3월.중)

본청 재무과 계약의뢰(2017. 3월.말)

계약 및 착공(2017. 4월.중)

준공 (2017. 12월)

별첨 : 1. 기술용역타당성 심사요청서 1부.

2. 용역설명서 및 과업지시서 1부.

3. 설계서 1부.

4. 관계법령 1부. 끝