문서번호	건축기획과-3650
결재일자	2017.2.15.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

			시 민
주무관		녹색건축팀장	건축기획과장
공경배		백윤기	02/15 박경서
협조
	주무관		윤별

『건축물 태양광 효율증대를 위한 설치기준 개발용역』

과업기간 연장 계약변경 계획

2017. 2

『건축물 태양광 효율증대를 위한 설치기준 개발용역』

과업기간 연장 계약변경 계획

기존 설치된 태양광의 사례별 발전효율 차이를 파악하고자 하였으나 태양광 설치자가 발전량 데이터를 보존하고 있지 않은 사례가 많아 직접 장비를 설치, 모니터링하기 위하여 과업기간을 연장코자 함

Ⅰ		용역개요

□ 용 역 명 : 건축물 태양광 효율증대를 위한 설치기준 개발

□ 사업개요

구 분	계약금액	준공일	계약자	기타
계약현황	70,840천원	2017.2.26	㈜친환경계획그룹 청연

Ⅱ		추진경위

○ 2016.08.01 : 용역계약 및 착수

○ 2016.09.20 : 착수 및 현장조사 계획 보고

○ 2016.10~12 : 태양광 시설의 설치유형별 발전량 조사

- 기존 사례 조사를 통한 태양광 시설의 유형별 효율성 분석

- 주변 건물 등 지장물 유무, 설치위치 및 각도 등에 따른 발전효율 차이 분석

※ 현장조사를 통해 설치위치, 각도, 발전용량 등 기초조사 완료하였으나 효율성분석에 필요한 실제 발전량 파악이 안됨(사용자의 발전량 자료 미 관리)

○ 2017.01 : 발전량 측정 장비업체 및 모니터링 가능 건물 섭외

○ 2017.02 : 발전량 측정장비 설치 및 모니터링을 위한 과업기간 연장 요청

Ⅲ		계약변경 내용

□ 변경내용(기간연장)

구 분	계약금액	준공일	계약자	기타
변경전	70,840천원	2017.02.26	㈜친환경계획그룹 청연	과업내용 변경 없음
변경후	변경없음	2017.06.26	변경없음

□ 변경사유

○ 태양광 설치자가 발전량 데이터를 보존하고 있지 않음

○ 계약상대자가 측정장비 설치 후 데이터 신규 수집하기로 함

※ 계약 상대자 귀책 사유 없음

□ 연장기간 검토

○ 건축주 동의를 받아 측정장비 설치 후 발전량 모니터링 및 분석 및 정리를 위한 기간 연장(4개월)

- 건축주 동의 및 장비설치, 모니터링 3개월, 자료정리 1개월

□ 검토결과

○ 과업의 목적달성을 위해 과업기간을 연장하고자 함

Ⅳ		향후 추진계획

○ 2017. 02 : 과업기간 변경 계약체결 및 과업 추진

○ 2017. 03~05 : 태양광 발전시설 사례별 발전량 모니터링

○ 2017. 06 : 용역 최종보고 및 준공

붙임 : 용역기간 연장 요청서(사유서 포함) 1부.  끝.