문서번호	조경과-2362
결재일자	2017.2.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		조경시설팀장	조경과장
김상주		하재호	02/15 이원영
협조
	주무관		온수진

- 서울로 7017 편의시설 인테리어 관련 -

실무회의 개최 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

푸 른 도 시 국

(조  경  과)

- 서울로 7017 편의시설 인테리어 관련 -

실무회의 개최 결과 보고

□ 회의개요

○ 일    시 : 2017. 2.14.(화) 14:00 ~ 16:00

○ 장    소 : 푸른도시국 조경과장 집무실 (무교별관, 더익스체인지 서울빌딩 9층)

○ 참 석 자

- 서울시 : 조경과장, 조경시설팀장, 관광안내서비스팀장, 서울역기획단(담당), 건축부(담당)

- 용역사 : 이교석 팀장(MVRDV)

- 감리단·시공사 : 장진택 이사(건축 감리),  박대서 소장(건축 현장소장)

- 인테리어 설계 : 이래모 이사(디자인 담), 조경민 대표

- 서울관광마케팅(주) : 이해진 과장 등 4명

○ 논의사항 : 관리사무소·편의시설 인테리어 관계 및 추진일정 논의

□ 공사 진행사항

○ 편의시설 추진 공정율 : 51% - 세부 진행상황 “별첨”

○ 관리사무소 : 골조공사 - 완료 / 벽체 거푸집 설치 및 철근 배근 - 진행 중

□ 회의결과

○ 관리사무소는 「7017 운영팀」이 ‘17.3.20. 입주할 수 있도록 공정 추진

○ 서울로 여행자카페 2층(관리사무소) 인테리어 기본방향

- 자원봉사자실, 다목적홀(강의, 회의, 브리핑, 파티 등), 회의실 등으로 이용

- 접이식 테이블과 접이식 의자로 구성된 열린(공유)공간 형태

- 입구에 작은 안내데스크 배치, 싱크대와 수납공간은 폴딩도어 처리

○ 인테리어 설계는 기능부서별 검토하고, 수합하여 다음 주까지 도기본(건축부) 제출

- 관광사업과와 서울관광마케팅(주)에서는 편의시설 인테리어 설계도면을 받아 설계내용(칼라코드, 공간계획 등)에 대해 MVRDV(이교석팀장)와 논의하고 보완 결정

○ 민간위탁 편의시설(8개소) 내부 인테리어 범위에 대해서는 서울역기획단, 조경과, 관광사업과 등과 추가 회의 필요.

붙임 : 편의시설별 공사진행 상황1부. / 인테리어 설계 기본도면 1부./ 칼라코드 1부.   끝.

서울로 7017 편의시설별 공사진행 상황

위 치	편의시설 명		유/무인	직 경 (m)	높 이 (m)	바닥면적 (㎡)	현 공 정
	변 경 전	네이밍 자문 결과
지상 구간 (회현역5번출구 ~고가시점)	호기심화분	호기심화분 (보여요)	무인	D=2.00	H=3.10	2.09	벽체거푸집 제작설치 및 철근배근
	관광안내소+7017 기념관	서울로안내소	유인	D=5.00	H=4.05	13.53	방수턱 거푸집 설치 및 철근배근
	SHOP	서울로가게	유인	D=5.00	H=4.05	13.53	기초 거푸집 제작 설치 및 철근 배근
고가 상부	목련카페	목련○○○	유인	D=6.35	H=4.75	16.12	바닥거푸집 설치 및 철근배근
	목련스테이지	목련무대	무인	D=5.00	H=0.60	11.97	골조공사 완료
	전망카페+꽃집	수국○○○	유인	D=7.65	H=5.00	42.50	작업발판 및 안전난간 설치
	호기심화분	호기심화분 (신비해요)	무인	D=2.00	H=3.10	20.90	벽체거푸집 제작설치 및 철근배근
	친수공간 (족욕탕)	공중자연쉼터	무인	D=3.50	H=0.67	9.61	골조공사 완료
	트렘폴린(2개)	방방놀이터	무인	D=3.00	H=2.50	7.07 7.07	골조공사 완료
	전시장(아욱과)	서울로전시관	유인	D=6.35	H=4.75	16.12	방수턱 거푸집 설치 및 철근배근
	장미카페	장미○○○	유인	D=8.33	H=5.00	41.84	바닥거푸집 설치 및 철근배근
	장미무대	장미무대	무인	D=4.20	H=4.50	13.20	방수턱 거푸집 설치 및 철근배근
	정원관리체험관	정원교실	유인	D=6.35	H=4.65	16.12	벽체 및 기둥제작 설치
	인형극장	인형극장	무인	D=2.50	H=3.80	3.56	지붕슬래브 서푸집 설치 및 철근배근
	호기심화분	호기심화분 (들려요)	무인	D=2.00	H=3.10	20.9	토공사 및 기초부 철근 배근
고가 하부 (퇴계로교통섬)	퇴계로 여행자 카페(1층)	서울로 여행자카페	유인	D=13.0	H=7.30	119.79	정화조 벽체 거푸집 설치 및 콘크리트 타설
	관리사무소(2층)	(자원봉사자실, 공유공간)				110.93
고가 하부 (만리동광장)	키오스크	도토리○○○	무인	D=3.50	H=3.80	9.08	골조공사 완료
	여행자 카페	7017 ○○○	유인	D=13.0	H=4.40	119.79	창호실측 및 제작
	화장실관리소 등(고가하부)	서울로 관리사무소	유인	35.40m (길이)	10.00m (폭)	354.00	1층 벽체 거푸집 설치 및 철근배근