문서번호	시설관리과-3508
결재일자	2017.2.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	시설관리과장	강남수도사업소장
강희창	박희철	02/15 차장운
협 조

“명품 아리수, 명품 강남수도”
교통소통대책 수립 용역발주 계획 (이수고가차도~사평지하차도간 배수관)

2017년 2월

강남수도사업소

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□	한국산업기술 시험원
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	■

교통소통대책 수립 용역발주 계획

「이수고가차도 ~ 사평지하차도간 배수관 정비공사」

2017년도 우리사업소에서 시행 예정인 『이수고가차도 ~ 사평지하차도간 배수관 정비공사』구간에 대한 교통소통대책 수립 용역시행을 제 374차 기술용역 타당성심사 결과에 의거 아래와 같이 추진하여 배수관 정비공사 추진에 만전을 기하고자 함. (기술심사담당관-2697(`17.2.8))

□ 관련근거

○ 행정2부시장 방침 기술심사담당관-106656호(2011.07.08)

「기술용역 발주기관 자체 시행 기준안」

○ 행정2부시장 방침 기술심사담당관-10817호(2010.08.02)

「도로점용공사장 교통소통대책 수립용역 개선방안」

□ 용역의 목적

○ 서초구 사평로상의 기존 노후상수도관 교체에 따른 각종 교통상황 발생에 적절히 대처하고 교통흐름을 원활하게 유지함은 물론 도로점용 공사에 따른 시민불편 사항을 최소화 하고자 계획을 수립하고자 함.

□ 용역 개요

○ 용 역 명 : 이수고가차도 ~ 사평지하차도간 배수관 정비공사 교통소통대책  수립 용역

○ 사업개요 : D = 1,200㎜, L =600m

○ 공사위치 : 반포동 111-1 ~ 반포동 64-1번지 간(사평로)

○ 총용역비 : 9,900,000원

□ 세부 추진계획

○ 교통소통대책 타당성 심사결과

- 부    서 : 서울시 기술심사담당관

- 심 의 일 : ‘17. 2. 8(수)

- 심의결과 : 9,900,000원

○ 용역발주

- 용역발주 : ‘17. 2. 15.

- 방    법 :  수의계약

- 용역기간 : 착수일로부터 40일

○ 수의계약 법령 및 예규근거

- 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률제9조 제1항

- 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 제25조제1항제5호

- 지방자치단체 입찰 및 계약집행 기준(행정자치부 예규제40호)

○ 수의계약 대상

- 업체명 : ㈜상상이앤씨  대표 안정림

- 주  소 : 서울시 강남구 언주로81길 8, 202(역삼동)

- 연락처 : 070-4420-2368, *************

- 준공기한 : 착수일로부터 40일

(단, 교통처리심의위원회 통과시까지 연장할 수 있음)

○ 계약의뢰

- 부    서 : 행정지원과

- 의 뢰 일 : ‘17. 2. 15.

○ 성과품 제출

- 납품예정 : ‘17. 3. 31(금) 예정

- 수    량 : 20부

○ 소요예산

- 용역비 : 9,900,000원

- 예산과목 : 자본적지출,유형자산취득,구축물,시설비(송배수관정비)

□ 기대효과

○ 안전한 도로교통 환경조성

○ 공사시행으로 발생할 수 있는 교통정체 해소

○ 2017년 예산 조기집행 추진에 기여, 경제활력 제고 및 서민생활 안정화 도모

따로붙임 : 1. 교통 위치도 1부.

2. 용역비 산출내역서 1부.

3. 견적서 3부.

4. 사업자등록증 1부. 끝.