투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	건설총괄부장
(경유)
제목	관급자재 납품기한 연기요청(서울기록원 건립공사)

우리 본부에서 시행 중인「서울기록원 건립공사」와 관련하여 관급자재(시멘트)에 대한 납품기한을 아래와 같이 연기요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 관급자재 납품기한 변경요청

품명	납품 요구번호	단위	납품기한
			당 초	변 경
시멘트	12-16-1-54867-00	포	2017. 2. 19	2017. 5. 21

나. 납품기한 연기사유 : 본 공사 기간 연장에 따른 관급자재 사용시기 조정.

붙임 : 납품연장요청 관련서류 각 1부.  끝.

	건축부장
★주무관	조문석		복지시설과장	조영수		건축부장	02/16 김진용
협조자	주무관	시희식
시행	건축부-2693	(		)	접수		(		)
우			/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-2133-2424	/전송	02-2133-1052	/		/	부분공개(5)