문서번호	안전치수과-3090		주무관	치수계획팀장	안전치수과장		안전건설교통국장		부구청장	구청장
			최정필	한정환	신상식		김해성		백호	02/15 김기동
결재일자	2017.2.15.
공개여부	대시민공개
			협 조
방침번호	구청장 방침 제218호

▶ 관내 하수관 청소의

효율적인 유지관리를 위한 Guide-Map 구축 계획

안전건설교통국

(안전치수과)

▶ 관내 하수관 청소의

효율적인 유지관리를 위한 Guide-Map 구축 계획

우리구에서 수해예방 및 악취방지를 위해 매년 시행하고 있는 관내 하수관 청소(세정 및 준설)의 효율적인 작업을 위해 Guide-Map을 구축하여

보다 체계적이고 시스템화된 하수관거 청소 유지관리를 시행하고자 함

Ⅰ			현 황

○ 하수관 청소(세정 및 준설) 작업시행 방법(기정)

- 세정 작업 : 악취개선, 하수관로 물청소

▹ 작업 대상 : 관내 하수관로 전체

▹ 작업 방법 : 우선순위, 지역단위등으로 구분하여 연초 계약한 도급업체에

순차적으로 작업지시

※ 우선순위 : 수해 중점관리구역, 다중이용 시설(시장, 특화거리), 악취민원

발생지역

- 준설 작업 : 하수관거 퇴적토 흡입준설

▹ 작업 대상 : 관내 하수관거 전체

▹ 작업 방법 : 우기전 중점관리지역등 수해취약지역에 대하여 우선적으로

작업지시후 민원발생등 기타 지역에 대하여 연초 계약한

도급업체에 순차적으로 작업지시

※ 우선순위 : 수해 중점관리구역, 배수분구 종합정비공사 제외 지역,

퇴적토로 인한 조사 불탐구간등

○ 최근3년간 하수관 청소 현황

2014년		2015년		2016년		3년 평균
준설(㎥)	세정(km)	준설(㎥)	세정(km)	준설(㎥)	세정(km)	준설(㎥)	세정(km)
1,852	177	2,271	231	2,444	245	2,189	217

Ⅱ			문 제 점

○ 하수관 청소(세정 및 준설)를 위한 Data(최소유속, 퇴적량, 청소 시행

여부) 부재로 매년 청소대상 하수관로의 정확한 실태파악과 효율적인

예산집행에 어려움이 있음

⇒ 축적된 Data의 부재는 인사발령에 따른 담당직원 변경시 청소대상

하수관로 실태파악에 많은 시간과 현장답사가 필요하여 행정력 낭비 및

업무공백이 발생함

Ⅲ			개선방향

○ 하수관 청소(세정 및 준설) 유지관리에 대한 체계적인 Map 개념

도입필요

○ 하수관 청소(세정 및 준설) 대상 지역을 등급별로 구분하고 기준 제시

※ 예) 1등급 구역 지정(중점적 관리) ⇒ 분기별 1회 청소

2등급 구역 지정(정기적 관리) ⇒ 반기별 1회 청소

3등급 구역 지정(평시 관리) ⇒ 연 1회 청소

○ 최근(5년간) 및 향후 시행한 하수관거 청소(세정 및 준설) 위치를

Database화 하여 보다 효율적인 하수관로 청소 유지관리 실시

○ 하수관 준설토 사전조사에 필요한 인력부족으로 하수관로 상태파악에

어려움이 있으므로 하수관로 청소 Map을 활용하여 등급별 작업계획        수립을 통한 효율적인 예산집행

Ⅳ			세부 추진계획

○ 한국건설기술연구원과 용역 시행(수의계약)

- 수의계약 사유 : 우리구 관내 악취취약지역 조사 및 악취지도를

작성한 용역업체로 관내의 하수관거 현황 파악 및 지역특성을 잘

알고 있어 수의계약 시행

- 소요 예산 : 20,000천원(악취개선 사업비 활용)

○ 용역 검토 계획

- 하수관의 체계적이고 효율적인 준설 및 세정작업을 위한 이른바

“하수관 청소 Guide-Map”구축

▹ 세정 및 준설작업 우선 실시 지역등 등급별로 구분한 Map 구축

▹ 등급별로 하수관로 청소(세정 및 준설) 기준 제시

- 최근 5년간 노선별 하수관거 청소(세정 및 준설) 현황을 용역업체에

제공 ⇒ 하수도 GIS 전산시스템상 최소유속 데이터 확인 ⇒ 현장

조사 실시 ⇒ Database화

Ⅴ			향후 추진계획

○ 2017. 2. 17 : 하수관 청소(준설 및 세정) 유지관리 Guide-map

구축 용역 발주

○ 2017. 3. 31 : 용역 착수 및 중간보고

○ 2017. 5. 30 : 용역 준공

○ 2017. 6. ~  : 용역 결과를 하수관거 청소(세정 및 준설) 작업에 반영

Ⅵ			기대효과

○ 축적된 Data와 Map을 기반으로 한 하수관 청소(세정 및 준설)가

가능하여 보다 체계적이고 효율적인 하수도 유지관리 제고

○ 2014년 구축한 악취등급 지도와 연속하여 하수관 청소 Guide-Map을

구축함으로써 악취없는 광진실현

붙임  하수관 청소 유지관리 Guide-Map(예시) 1부.  끝.