문서번호	어린이병원원무과-4410
결재일자	2014.3.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
★주무관	서무팀장	원무과장
이경주	김길권	03/26 김석태
협 조

병원인증 관련  시설물 정비계획

2014. 3

서울특별시어린이병원

원무과

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □ 기타 □				무 ■
	●	기타	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(	조달청	)	무 ■
	●	관련단체	:	유 □	(		)	무 ■

2014년 상반기 시설물 보수공사 계획

우리병원 인증과 관련 창호부위 안전바 설치 등 예비인증시 지적된 시설물을 조속히 보수하여 병원인증에 만전을 기하고자 합니다

Ⅰ		관련근거

병원 예비인증 지적사항 조치

Ⅱ		추진방향

병원인증 4월 이전 공사완료

2014년 병원인증에 지장이 없도록 지적사항 반영 조치

Ⅲ		주요 공사내용

3,4층 창호 안전난간대(3단) 설치

- 3층 W=1.8m(3단) 9개소, W=1m(3단) 1개소

- 4층 1.8m(3단) 12개소, W=1m(3단) 1개소

물질안전 조건에 의한 약품 저장고 설치

- 식당사용 유해물질인 오븐세척세제, 식기세척 세제등 10종   보관용 철제 사물함 제작설치.

1층 조리원 샤워실, 화장실 별도 구획

- 노몰딩용 화장실 칸막이 설치

- 기존 샤워기 수전철거, 냉온수 세탁기용 수전교체

61병동 화장실 타일 보수공사

의료폐기물 창고 내부 도장

의무기록실 보관창고 의무기록지 수납장 설치

진료부 행정실 확장 및 도어설치공사

Ⅳ		예 산 현 황

예산과목

-  어린이병원 진료수준 재고, 어린이병원 청사시설 운영관리,

일반운영비, 공공운영비

소요예산 : 7,975천원

Ⅴ		추 진 계 획

공사기간

- 2014. 3월 (15일)

계약방법

- 관련업체로부터 견적서를 제출받아 가격이 저렴한 업체와 수의계약

관련법규

- 지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률시행령 제25조 제5호

Ⅳ		향후추진일정

공사발주 : 2014.03.27(목)

공사착공 : 2014.03.28(금)

공사완료 : 2014.04월

붙임문서 1. 설계서 1부. 끝.