문서번호		생활보장과-10555		주무관		장애인복지팀장		생활보장과장		생활복지국장
결재일자		2016.8.23.
				고영석		천태석		이승하		08/23 강대형
공개여부		대시민공개
				협 조
보도여부
					기획예산과장		代이택모
					예산팀장		전혜정
	- 2015년도 특별교부사업비 - 강북장애인종합복지관 기능보강사업 계획 변경
2016.08.23.
강 북 구 (생활보장과)

- 2015년도 특별교부사업비 -

강북장애인종합복지관 기능보강사업 계획 변경

사업 진행에 있어 이용자들의 요구 사항을 반영하고, 장애인 편의시설 확충과

함께 시설 환경을 보다 효율적으로 개선하기 위해 일부사업의 당초 예산을 변경하여 기능보강 사업을 진행하고자 함

Ⅰ	기능보강사업 개요

□ 사업기간 : 2016. 8월 ~ 10월

□ 총사업비 : 500,000천원(2015년도 특별교부사업비, 시비)

□ 사업내용

○ 시설개보수 및 환경개선

○ 기계실 배관라인 교체

○ 승합차량 교체

○ 기능향상실 운동기구 및 검사도구 구입

○ 복지관 외벽공사

Ⅱ	변경내역

기능보강사업 내역	당 초	변 경	증(△)감	비 고
① 층별 시설개보수 및 환경개선	148,000,000	293,029,000	145,029,000
② 기계실 배관라인교체	16,390,000	16,390,000	0
③ 승합차량 교체	26,090,000	23,400,000	△2,690,000
④ 기능향상실 운동 기구 및 검사 도구 구입 등	98,500,000	10,226,000	△88,274,000
⑤ 복지관 외벽공사	211,020,000	156,955,000	△54,065,000
합 계	500,000,000	500,000,000	0

Ⅲ	변경사유

□ 층별 시설개보수 및 환경개선공사

○ 당초 2,4,5,6층의 프로그램실(치료실) 반자동문 설치, 7층 훈련반실 정비,

2층 보호자 쉼터 리모델링을 계획하였으나,

○ 공사 설계작업을 진행하면서 이용자들의 욕구를 반영하고, 공간을 더 효과적으로

사용하기 위해 4층 치료실 및 7층 훈련반실 조정, 4·6층 공간활용, 지하목욕탕

입구 환경개선, 5층 통합사무실 시설개보수 등의 예산이 추가 됨

□ 기능 향상실 운동기구 및 검사도구 구입

○ 기능보강사업비로 구매할 수 있는 작업테이블, 보바스테이블 등 장애인 치료

관련 품목은 보조금으로 구매할 수 있으나,

○ 전산기기(컴퓨터 30대, 휴대용 빔 프로젝트, 노트북 등) 및 사무실 집기류 구입은

기능보강사업비로 집행할 수 없으며, 향후 복지관 자체 구매 계획을 세워 순차적

으로 구매

- 구입비 잔액을 층별 시설개보수 및 환경개선공사로 집행

□ 복지관 외벽공사

○ 당초 방수 및 외벽공사였으나, 방수에 드는 비용이 예산범위를 넘어서 부득이

외벽공사만 진행

- 복지관 외벽 방수에 필요한 예산은 복지관 자체사업비로 진행

Ⅳ	행정사항

□  계획변경으로 인하여 당초 사업비 집행계획이 불가능한 전산기기 및 사무실

집기구매, 시설 외벽방수에 대하여 자체 비용으로 구매 및 시설공사 할 수

있도록 관리 감독