문서번호	급수운영과-3543
결재일자	2017.2.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	주무관	급수운영과장		북부수도사업소장
김종필토	이승완	장종욱		02/16 박철규
협 조

2016년 복부관내 포장도로 굴착복구공사-2차(단가계약) 발주계획

2017. 2.

북부수도사업소

(급수운영과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■

2016년 북부관내 포장도로 굴착복구공사-2차 발주계획

’16년 우리사업소 관내 지역에서 시행하는 각종 상수도공사로 인하여 굴착하는 도로에 대한 포장도로 복구공사를 발주하여 기 계약된 업체가 ’17년 6월 30일까지로 예정되어 있으나, 계약금액이 ‘17년 2월중 초과될 것으로 예상됨에 따라 지속적이고 원활한 포장복구공사를 위하여 추가 발주계획을 보고 드림.

현   황

공 사 명 : 2016년 북부관내 포장도로 굴착복구공사(장기계속단가계약)

공사개요 : 아스팔트포장 185a, 콘크리트포장 10a, 보도블록폭장 7a

공사기간 : 2016. 6. 1. ~ 2017. 6. 30

도 급 자 : 태령토건(주) 대표 정윤영

도 급 비 : 1,267,114,030원

보고내용

현재 진행중인『2016년 북부관내 포장도로 굴착복구공사』의 계약기간은 2017년 6월 30일로 예정되어 있으나, 계약금액이 조기 소진될 예정으로 지속적인 포장복구를 위하여 추가 발주가 필요한 실정임.

예산집행 현황                                          (단위 : 원)

구 분	계약금액	기 집행액	잔 액	비 고
계약금액 (도급비)	1,267,114,030	1,093,455,000	173,659,000

발주계획

상기와 같이『2016년 북부관내 포장도로 굴착복구공사』의 계약금액이 소진 예정임에 따라 각종 상수도공사로 인하여 수반되는 지속적이고 원활한 포장도로 복구공사를 위하여 2차(추가) 발주하여 시민불편을 최소화하고 상수도공사 시행에 지장이 없도록 하고자 함.

발주계획

- 공 사 명 : 2016년 북부관내 포장도로 굴착복구공사(2차)

- 공사위치 : 강북구, 도봉구, 노원구 관내

- 공사개요 : 아스팔트포장 144a, 콘크리트포장 6a, 보도블록폭장 13a

- 공사기간 : 2017. 2. ~ 2017. 6.30.(신규업체 계약시까지)

- 발주금액(심사요청액) : 830,000,000원

발주물량 산출

- 발주 예정물량은 3개년(2014~2016년) 시행물량 평균값을 산정 하고 향후 2017년 각종 상수도공사 예상물량을 추가 산정

계약방법 및 추진계획

계약방법[국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제22조(단가계약)]

- 총 예정물량은 장기계속단가계약의 절차에 따라 2015~2016년 까지 3개년 평균치 물량을 근거로 2017년 6월까지 예상물량을 산출

입찰방법 : 일반공개경쟁입찰(긴급)

세부 추진일정

- 공사계약 심사요청 : 2017. 2. 17.(사업소 → 본부 재무회계과)

- 심사결과 통보 : 2017. 2. 23.(본부 재무회계과 → 사업소)

- 공사발주 및 계약의뢰 : 2017. 2. 24(사업소 → 본청 재무과)

- 공사계약 및 착공 : 2017. 3월 중

향후 추진계획

- 본부 재무회계과에 계약심사 의뢰하여 그 결과에 의거 발주시행

붙 임 : 설계내역서 1부.  끝.