문서번호	수도자재관리센터-2744
결재일자	2017.2.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
공사자재관리팀장		소장
송영무		02/17 성시영
협 조
	행정관리팀장		정희순

2017년도

공사용 자재 수급 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 02

수도자재관리센터

2017년도

공사용 자재 수급 계획

통합구매를 통하여 우수한 품질의 공사용 자재를 확보하고

공사현장에서 필요한 시기에 안정적으로 공급하고자 함.

1		자재 수급관리 개요

□ 근    거 : 서울특별시 수도자재관리규칙 제5조 제2항

□ 대상자재 : 본부 및 수도사업소 상수도공사용 관급자재

○  관급 자재 : 직관류(주철관,강관,이형관 등), 이탈방지압륜, 철개류,

계량기보호통류, 밸브류(소화전 포함), 재생아스콘 등

□ 자재 수급체계

공사부서 (사업소, 본부)	⇒ 구매 요구	수도자재관리센터	⇔ 출고 반납	공사현장 (공사부서)
․ 자재 사용계획수립 ․ 자재 구매요구 및 예산 재배정		․ 자재 통합구매 및 검사․ 검수 ․ 자재 입 ․ 출고 관리		․ 자재 사용(시공) ․ 남은 자재 반납

※ 행정포털『자재관리시스템』에 의한 수급관리

□ 자재 적치장 운용

○  수도자재관리센터 : 공사용 자재 적치

- 야적장(13,000㎡) : 주철관류, 이형관류, 철개류, 계량기보호통 등

- 자재창고(1,385㎡) : 밸브류, 고무링류, 볼트너트류 등

○  강북아리수정수센터 : 긴급 누수복구 자재 등

- 야적장(1,720㎡) : 400mm이상 강 직관류 및 이형관류

2		자재 수급계획

□ 추진 방향

○ 상수도 관련 법령 및 규정에 적합한 품질이 우수한 자재 수급

○ 원활한 자재 수급을 위한 적기 구매 및 적절한 재고관리

○ 조달구매 원칙에 의한 자재 구매의 공정성 및 투명성 확보

- 수의계약 지양(2017년 순환아스콘 일반경쟁입찰로 계약체결)

□ 자재 수급

○ 본부 상수도기술심의위원회에서 사용 승인된 자재 구매

○ 공사부서의 자재사용계획에 의거 구매요구된 자재에 대해 공사시기,           재고량, 납품기한 등을 감안, 구매 수량 및 시기를 탄력적 조정

○ 성수기의 원활한 자재 공급을 위하여 사용빈도에 따라 전년 사용량의               10~30% 정도를 저장자재로 확보

○ 2018년 2~4월 공사에 소요될 자재의 원활한 공급을 위해 예산

범위 내에서 저장자재 적정 확보

○ 주요 자재인 주철 직관류 및 이형관류는 내면 에폭시(BPF:Bisphenol

Free)도장 제품으로 구매 ․ 공급

※ 현재 재고로 보유하고 있는 시멘트라이닝 주철관은 우선 출고

□ 구매 계획

○ 2017년 구매계획량

구 분	합 계	직관류	이형관	밸브류	이탈방지압륜	철개류	계량기 보호통	재생 아스콘
수 량	186,450	18,700	48,500	7,900	48,900	6,600	24,300	31,550
금 액 (백만원)	23,364	7,667	2,668	4,345	2,445	2,310	2,819	1,111

(단위 : 본,개,조,톤)

※ 2016년 구매실적 : 178,844(본,개,조,톤) / 22,828백만원

- 구매계획량 산정 기준

· 최근 5년간(2012년~2016년) 평균출고량을 참고함.

· 2017년도 송.배수관 및 급.배수관 정비계획(전년대비 5% 감),         노후밸브 정비계획(전년대비 19% 증) 등 관련 공사계획을 반영함

· 재생아스콘은 각 공사부서의 사용 예정량을 조사하여 산정

○ 품목별 구매방법

- 조달구매 : 주철관류(직관, 이형관 - 에폭시도장), 밸브류,

이탈방지압륜, 계량기보호통, 철개류

- 일반구매 : 강관류, 옥외소화전, 재생아스콘

※ 2016년 구매비율(금액)

조달 59.9%	일반 40.1%

□ 출고관리

○ 주요 자재 월별 출고량 변화 (주철관, 최근 5년간 평균)

○ 성수기(4 ~ 8월) 출고량 급증에 대비하여 월별 예상 출고량 관리

3		자재 검사

□ 자재 품질검사 : 규격검사, 성능 및 재료 시험

○ 검사기준 : KS 규정, KWWA 규정, 단체표준, 구매지침서 적용

○ 대상자재 : 직관류, 이형관류, 이탈방지압륜, 계량기보호통류,

밸브류, 철개류 등

-  공장 검사 : 규격검사, 재료시험, 성능시험 등을 생산업체에 출장

하여 검사한 후 납품 조치

-  입고 검사 : 공장검사를 대체하여 납품된 자재에 대해 자재센터

에서 관능 및 규격 검사를 실시한 후 납품 조치

□ 자재 품질검사 세부기준

○ 각 자재별 생산수량 또는 로트 수량에 대한 샘플 검사실시

○ 재료시험은 물리시험 및 화학시험등 KS 및 관련규정에 따라 실시하고      시험성적서를 제출해야 함

○ 시험성적서는 공인시험기관성적서와 시험장비를 갖추고 있는 제작사         또는 협력업체(주물업체, 고무링업체 등)의 자체시험성적서를 적정하게

분배하여 인정

○ 도료(피복) 및 고무(라이닝 등)에 대한 물리시험(비중시험 등) 및

화학시험(용출시험 등)은 공인기관시험성적서 및 도료제작사               (KS 인증업체 및 시험 장비를 갖춘 업체-거래명세서 제출) 자체시험        성적서 인정

○ 청동주물의 용출시험 및 화학성분분석시험은 공인기관 시험성적서,

부품제작사(KS 인증업체, 시험장비를 갖춘 업체) 자체시험성적서

인정

○ 전년도 검사에 불합격이 없는 제품은 공장검사 일부 생략(50%

범위 내) 단, 버터플라이밸브는 공장검사를 생략하지 않음.

○ 공장검사 불합격 시 재검사는 샘플수량을 2배로 검사강화 및              조달청에 통보 단, 수정 가능한 경미사항은 제외함.

○ 당해연도 검사에 동일제품에 2회 불합격할 경우 그 익일로부터

3개월 이상 구매 제한 : 조달청에 통보

○ 납품 전량에 대하여 KS 및 관련규정에 의하여 제작사 자체규격         검사(내압, 두께, 무게 등)를 실시하고 검사서를 제출

□ 용출시험 : 수도법 제14조 및 KS 검사기준 적용

○ 수돗물에 접촉하는 모든 수도공사용 자재

○ 위생안전 기준 및 KS 기준 시험성적서 인정(자체성적서 포함)

○ 성적서 인정은 검사일 기준 1년 이내로 한정하며, KC인증 제품은         생략 가능

○ 동일도료 사용에 대한 동일업체 제품에 대하여 공통 인정

-  계약금액 1억원 이하는 위생기준검사 또는 KS 용출검사 실적이

있는 경우 해당성적서로 대체함

-  도료의 제품 변경시 용출검사 실시하고 해당성적서 제출

4		효율적인 재고 및 안전 관리

□ 재고 관리

○ 재고조사

- 매일 입,출고 자재에 대해 전산 재고와 현장 재고의 일치여부 확인

- 재고량 일치 되지 않을 경우 원인분석 후 조치

○ 정비의 날 운영 : 필요 시

- 경미한 도색 및 정비는 자체에서 정비

- 자체 정비가 곤란한 경우 납품업체 협조

○ 장기 미사용 자재 해소

- 먼저 입고된 자재부터 우선하여 출고

- 장기재고 발생이 예상되는 자재는 유사기능 자재로 재고전환,              개조, 교환 등으로 소진

- 사용빈도가 적은 자재는 공사부서와 재협의 후 구매

□ 안전 관리

○ 장비운영, 자재적재 상태 등에 대해 매월 1회 안전교육 실시

○ 자재 입 ․ 출고 시 안전관리 강화

○ 작업 및 자재적재 상태 등 안전여부 수시점검

5		행정 사항

□ 『2017년도 공사용 자재 수급 계획』 통보 : 본부, 사업소

붙임 : 2017년도 공사용자재 구매계획량 1부.  끝.