문서번호	공원운영과-4033
결재일자	2014.3.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		공원운영과장	동부공원녹지사업소장
권지현		이상용	03/26 이춘희
협조
	주무관		신재원

「시민의숲 CPTED공원 조성공사」

실정보고(2차)에 따른 검토보고

2014. 3

공원운영과

(동부공원녹지사업소)

「시민의숲 CPTED공원 조성공사」

실정보고(2차)에 따른 검토보고

공사개요

❍ 공 사 명 : 시민의숲 CPTED공원 조성공사

❍ 공사기간 : 2013.12.23. ~ 2014. 4. 10

❍ 도 급 비 : 255,343,000원

❍ 도 급 자 : ㈜지산랜드  대표 김지현

실정보고 검토

❍ 관련근거 : 공사감독3처-2088(2014.3.20)

공 종	검토 요청사항	검 토 의 견	비 고
시설물	▶ 벤치 철거 34개소분 내역 반영	▶해당 공종 내역 반영 - 등의자 B철거 : 11개소 ->42개소(증31개소) - 평의자 철거 : 0개소 -> 3개소(증3개소)
	▶ 당초 이설하도록 설계된 야외테이블이 노후화로 철거가 필요	▶해당공종 내역 반영 - 야외테이블 이설 : 3개소 -> 0개소 - 야외테이블 철거 : 0개소 -> 3개소
	▶ 지식서재 주변이 물고임 등 배수가 원활치 않아 배수시설 추가 설치	▶ 해당공종 내역 반영 - 집수정 : 0개소 -> 1개소(증 1개소) - 배수관 설치 : 0m -> 18m (증 18m)
철거 및 포장	▶ 의자 34개소 및 야외테이블 3개소 철거분 폐기물처리 반영 필요	▶현장여건을 반영하여 해당공종을 반영 - 폐기물처리(폐콘크리트) : 25.37ton -> 32.29ton(증 6.92ton) - 폐기물처리(폐목재) 4.34ton -> 5.4ton (증 1.06ton) - 폐기물운반 : 30.01ton ->37.68ton (증7.67ton)
	▶화장실 가벽 철거지 복구에 대한 포장이 설계에 미반영되어 처리가 필요함	▶기존 소형고압블럭을 재활용하여 포장하고 부족분은 자재 구입하여 포장시공 - 보도용블럭 포장(재활용포장) : 0->17㎡(증 17㎡) - 보도용블럭 포장(자재구입) : 0->7㎡(증 7㎡)

설계변경 추가 사항

❍ 당초 설계되어 있던 야외 스크린 설치(지식까페)와 관련하여 현장 검토결과, 스크린의 야외 사용시 비바람등으로 훼손될 여지가 있고 빔 프로젝트 사용시 주간 이용이 어려운 점이 있어 화이트 보드 등 주․야간의 이용이 가능한 것으로 설계를 변경하고자 함

예산검토

❍ 설계변경 내역

(단위:천원)

구 분	당초금액 (도급금액)	공사비(천원)			증 감	비 고
		전 회	금 회(증감)	누 계
공급가액	232,130	-3,578	3,262	-316	-316
부 가 세	23,213	-358	326	-32	-32
도 급 비	255,343	-3,936	3,588	-348	-348

※ 상기내용은 개략적인 물량과 금액이며 시공시 현장상황에 따른 일부 경미한 변경사항은 설계변경시 반영토록 조치

검토의견

❍ 실정보고사항 검토결과 그 내용이 타당하므로 공사감독부서로 검토내용과 같이 시행토록 승인 통보하고, 추가된 설계변경사항도 함께 통보하여 추후 설계변경 시행코자 함.

붙 임 : 시설관리공단 실정보고 1부.  끝.