문서번호	시설관리과-6525
결재일자	2014.3.26.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관		시설관리과장
안규태		03/26 代고신석
협 조
	주무관		김태식

급수공사 연기보고(신설-103)

2014.  3.

명에 의거 『신길1동 외 9개동 상수도공사』 급수공사 감독중 아래와 같은 사항이 발생하여 보고합니다.

2014. 3. 26.

보고자 : 지방시설서기보 안규태

건   명 : 급수공사 연기 보고

작업지시내역

공사명	접수번호	지시내역
		지시번호	위 치	작업기간	공사종별	시공업체
신길1동외 9개동 상수도공사	201403190029	신설-103	신길동 4482-7	`14. 3. 21. ~`14. 3. 26.	신설	#### ###

보고내용

○ 상기 위치의 공사현장에서 현장사정(내부공사 지연)에 의한 공사연기원을 제출하여 급수공사 연기가 필요함

보고자 의견

○ 위와 같은 실정으로 아래와 같이 준공기한을 연기하여 공사시행에 만전을 기하고자 합니다.

지시번호	주소	당초 기간	변경후 기간	비고
신설-103	신길동 4482-2	`14. 3. 21. ~`14. 3. 26.	`14. 3. 21. ~`14. 4. 11.

붙임 : 준공연기원 각 1부(별도첨부).  끝.