문서번호	도로보수과-1803
결재일자	2017.2.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	주무관	도로보수과장		동부도로사업소장
이민호	송광석	김환겸		02/17 송만규
협 조

『안전하고 편안한 도로환경 제공을 위한』

2017년 노후포장도로 정비 추진계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 02.

동 부 도 로 사 업 소

(도 로 보 수 과)

『안전하고 편안한 도로환경 제공을 위한』

2017년 노후포장도로 정비 추진계획

2017년 노후 포장도로 정비를 시행하여 포장도로 내구성 증진 및 평탄성 향상등에 기여함으로써 시민에게 안전하고 편안한 도로환경을 제공코자 함.

	1		관 련 근 거

2017년 노후포장도로 정비 추진계획 통보

『도로관리과-816호(‘17.1.11)』

2017년 포장도로 유지관리사업 추진계획

『도로보수과-1062호(‘17.1.26)』

	2		사 업 개 요

❍ 위   치 : 언주로 등 7개노선 10개소

❍ 규   모 : 연장 6.990km, 면적 1,816a

- 일반포장구간         : 면적 1,778a

- 버스전용차로구간     : 면적     38a

❍ 예 산 액 : 6,443백만원

- 본 공 사             : 4,904백만원

- 굴착복구 소파보수    :   300백만원

- 폐아스콘 처리용역    :   400백만원

- 포장구간 노면표시    :   500백만원

- 버스전용차로         :   189백만원

- 불량맨홀 정비공사    :   150백만원(불량맨홀 정비공사에서 시행)

	3		정 비 계 획

□ 추진방향

❍ 아스팔트 포장공사 품질향상으로 내구수명 증대

❍ 관리감독 강화로 시공품질 향상

□ 추진계획

❍ 아스팔트 포장 내구성 및 품질향상 증대를 위한 맞춤형 포장재질 사용

- 일반차로는 1등급 골재사용으로 도로손상(포트홀, 소성변형등) 저감

- 버스전용차로, 사거리 정지선 구간 등 교통량이 많은 곳은 고내구성         포장재(SMA, CRMA) 사용으로 공용수명 향상

- 표층외 중증이하구간은 재생아스콘사용으로 순환골재 활성화에 기여

❍ 기존 표층(5cm) 재포장 방식 탈피하여 하부층 균열 및 소성변형등을        감안하여 포장단면 설계

❍ 일반차로 포장구간 현장조사(코아채취)로 통한 포장단면 설계 시공

- 시행기간 : 2017. 1. 23 ~ 2. 3(7일간)

- 공사규모 : 코아채취 117점(도로연장 100m당 1점 채취)

❍ 포장단면 결정을 위한 직원 회의 개최

- 일  시 : 2017. 2. 14(화) 10시, 도로보수과 사무실

- 참여자 : 도로보수과 전직원(노선담당자 의견 수렴)

❍ 노후포장도로 정비대상

연번	노선명	공사위치	차로	포장 종류	포장개요			포장년도	측정 균열깊이 (cm)	포장뚜께
					폭 (m)	연장 (m)	면적 (a)
계	7개노선 10개소					6,990	1,816
1	언주로	테헤란로 → 봉은사로	편도	1등급	12	780	93	2008	3~5	T=5cm(일반차로)
				SMA						T=10cm(정지선구간)
2	학동로	경기고사거리 ↔ 청담공원사거리	전폭	1등급	21	570	119	2009	3~5	T=5cm(일반차로)
				SMA						T=10cm(정지선구간)
3	남부 순환로	양재전화국사거리 → 매봉터널사거리	편도	CRMA	19.5	840	164	2008	4~5	T=5cm(일반차로)
										T=10cm(버스전용차로)
4	영동대로	도곡로 ↔ 역삼로	전폭	1등급	30	540	162	2008	4~5	T=5cm(일반차로)
				SMA						T=10cm(정지선구간)
5	영동대로	역삼로 ↔ 테헤란로	전폭	CRMA	30	460	138	2008	5~20	T=10cm(일반차로)
										T=20cm(버스전용차로)
6	위례성 대로	올림픽공원사거리 ↔ 몽촌토성역	전폭	1등급	30	1,160	348	2005	3~4	T=5cm(일반차로)
				SMA						T=10cm(정지선구간)
7	송파대로	올림픽훼미리 → 가락시장역사거리	편도	1등급SMA	15~ 30	460	138	2009	5~7	T=10cm
8	송파대로	올림픽훼미리 ↔ 건영아파트	전폭	1등급 SMA	30	700	210	2009	6~20	T=10cm(잠실방향)
										T=20cm(성남방향)
9	양재대로	길동사거리 → 둔촌동역사거리	편도	1등급 SMA	15~ 30	600	180	2007	6~10	T=10cm
10	양재대로	둔촌동역사거리 → 둔촌사거리	편도	1등급 SMA	15~30	880	264	2007	6~10	T=10cm

※ 1. 간선도로 교차로 정지선 50~100m구간은 SMA로 포장 시행

2. 가로변버스전용차가 있는 남부순환로 및 영동대로는 고내구성 포장재인         CRMA로 포장시행

	4		향 후 계 획

❍ ‘17. 02월 : 공사발주 시행

❍ ‘17. 03월 : 공사 착공

❍ ‘17. 11월 : 공사 준공

따로붙임 1. 공사위치도 1부.

2. 코아채취 결과서 1부(별도송부).  끝.