문서번호	계약심사과-3129
결재일자	2017.2.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		심사총괄팀장	계약심사과장
임장경		최광운	02/17 안호
협 조
	주무관			임종호

「2016년도 승강편의시설 설치공사 기본 및 실시설계」 설계경제성(VE) 심사 실행계획

2017. 2.

계약심사과

「2016년도 승강편의시설 설치공사 기본 및 실시설계」

설계경제성(VE) 심사 실행계획

서울특별시도시철도공사에서 추진하고 있는「승강편의시설 설치공사」에 대한 심사 전담팀을 구성하고, 설계경제성(VE) 실행 계획을 수립하여 추진하고자 함

Ⅰ		추진근거

□ 건설기술진흥법 시행령 제75조

□ 설계경제성 심사운영 개선계획(행정1부시장방침 제15호, ’17.1.22)

Ⅱ		심사개요

□ 추진부서 : 서울특별시도시철도공사(시설지원단)

□ 사  업  명 : 2016년도 승강편의시설 설치공사

□ 위    치 : 공덕역(5호선), 장승배기역, 광명사거리역(7호선)

□ 사업내용 : 승강편의시설 설치(에스컬레이터, 엘리베이터)

- 규    모 : 공덕역 E/S 2대, 장승배기역 E/S 2대+보조계단

광명사거리역 E/S 2대+E/L 1대

□ 공 사 비 : 6,591백만원

Ⅲ		심사계획

□ 주요 심사내용

○ 건설공사의 설계, 시공, 유지관리 등 경제성 분석

○ 공사 시행의 적정성 및 사용자 편의성

○ 시설물 안전 및 고효율 공법 적용의 가능성 등

□ 시행방법 : 전담팀 구성하여 심사

○ 전담팀 : 15명 내외

구 분	구 성 내 용	역 할
VE책임자 (3명)	▸외부 설계VE 전문가 3명 - (CVP)김성훈 대표, 아이엠이엔에이 - 진행 및 보고서 작성 2명	설계경제성 심사 업무 진행 심사결과 종합 결과보고서 작성
VE담당관	▸ 임장경 주무관	심사 총괄 및 결과보고서 정리
팀 원 (5명)	▸ 외부 검토위원 4명 - (토질) 정운기 전무, 동해종합기술공사 - (토질) 류재구 전무, 강원길엔지니어링 - (구조) 이상우 전무, ㈜이산 - (철도) 김재복 전무, ㈜태조 ▸ 내부 검토위원 1명 - (토목) 임장경 주무관	정보 분석, 검토, 아이디어 제안, 발표, 평가, 보고서 작성 등
발주부서 및 설계자	* ***** *********	사업설명 등 (설계내용, 현장설명 등)

□ 설계경제성 심사 시행절차

추진 일정		검토 절차		업무 내용
’17. 2. 14		설계경제성 운영 의뢰 (발주기관 → 계약심사과)		▸설계경제성 심사 신청서 접수
’17. 2. 17		설계경제성 심사 계획수립 (VE담당관)		▸추진일정, 시행방법 등 ▸자료 사전검토(심사위원)
’17. 2. 23 ~ 3. 10(11일)		설계경제성 검토회의 (심사 전담팀)		▸현장 확인 - 사업설명(설계자) ▸1,2차 검토회의 : 대안 구체화 - 아이디어제시, 결과이행 회의 ▸최종 검토회의 : 보완 및 의사결정
’17. 3. 10		설계경제성 심사 제안서 통보 (계약심사과 → 발주기관)		▸설계경제성 심사 제안서 통보
’17. 3. 13 ~ 3. 15(3일)		제안서 검토 및 반영계획 제출 (발주기관 → 계약심사과)		▸설계경제성 심사제안서 수용 여부 결정 및 통보
’17. 3. 22		심사결과 통보 (계약심사과 → 발주기관)		▸최종 결과보고서 작성 ▸심사결과 통보

□ 설계경제성 심사 검토회의 세부일정

일 시	내 용
’17.2.23(목) 14:00~18:00	- 사업설명 및 현장답사 ‣ 장소 : 계약심사과內 회의실, 공덕역 외 2개소
’17.3.03(금) 10:00~18:00	- 1차 검토회의 : 아이디어 제시, 대안 구체화 ‣ 장소 : 계약심사과內 회의실
’17.3.06(월) 10:00~18:00	- 2차 검토회의 : 대안에 대한 가치평가 및 분석 ‣ 장소 : 계약심사과內 회의실
’17.3.10(금) 14:00~18:00	- 최종 검토회의 : 이행회의 및 제안채택 ‣ 장소 : 계약심사과內 회의실

Ⅳ		소요예산

□ 소요예산 : 11,030천원

○ 외부전문가 수당 : 10,030천원

— 리더(기술사+보고서작성)   : 2,620천원(2,620천원 × 1명)

— 위원(기술사)                : 5,384천원(1,346천원 × 4명)

— 퍼실리테이터(중급기술자) : 2,026천원(1,013천원 × 2명)

※「설계경제성심사제도 운영현황 및 개선방안」(계약심사과-10559(’15.6.15))에 따라 산출

○ 회의다과비 등 운영비 : 1,000천원

□ 예산과목

○ 서울특별시도시철도공사 예산 활용

Ⅴ		향후계획

□ 설계경제성 심사결과서 통보  - - -  - - -  ’17.3.22

붙   임 : 1) 설계경제성 심사 요청 공문 1부.

2) 설계경제성 심사 신청서 1부.  끝.