문서번호	안전지원과-3690
결재일자	2017.2.20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

						시 민
담당자		전산기획팀장		안전지원과장
이위수		김형국		02/20 김송연
협 조

		소방공무원 특수건강검진정보시스템 구축 관련
S/W 개발사업 적정 사업기간 산정위원회 개최결과 보고

2017. 2

안전지원과

[전산기획팀]

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성인지	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□

‐ 소방공무원 특수건강검진정보시스템 구축 관련  ‐

S/W 개발사업 적정 사업기간 산정 위원회 개최결과 보고

소방공무원 특수건강검진 정보시스템 구축 사업과 관련하여 S/W 개발 사업에 대한 적정 사업 기간을 산정하기 위한 위원회 개최결과 보고임

Ⅰ		개 요

□ 개최개요

❍ 기    간 : 2017. 2. 17.(금) ~ 2. 20.(월)

❍ 장    소 : 소방재난본부, 서울종합방재센터 및 ㈜차후 사무실

❍ 인    원 : 6명(위원장 1명, 위원 5명)

- 소방재난본부 : 안전지원과장(위원장), 전신기획팀장(위원)

- 서울종합방재센터 : 전산통신과장(위원), 전산연구팀장(위원)

- ㈜차후 컨설팅 연구소 : 주영애 부장(위원), 유인창 차장(위원)

□ 대    상 : 소방공무원 특수건강검진정보시스템 구축

❍ 산출내역

- 서울시 정보기획담당관 예산타당성 심사결과에 의한 사업규모 및 산출

❍ 주요과업

- 예약관리 (기관별, 개인별, 검진기관별 예약 관리)

- 시스템 구축 (데이터 이관, 정보업로드, 검진기관관리, 검진정보 관리 등)

- 일반 요구 사항 (하자보수, 테스트 등)

□ 추진방법

❍ 위원별 직접 방문 수령 추진

Ⅱ		사전조사 결과 및 위원회 검토의견

□ 사전조사 결과

❍ 기능점수(FP) 산정결과 : 4.88개월

❍ 사업기초자료(사업계획서, 예산신청서, 제안요청서) : 5개월

❍ 유사사업 사업자료 비교 : 5개월

□ 위원회 검토의견

❍ 소프트웨어 개발사업의 적정개발기간 산정에 관한 사항으로 적정함

□ 위원회 종합의견

❍ 기능점수(FP)기반 산정 등 사전 조사결과 적정한 것으로 사료 됨

Ⅲ		최종결과

□ 사전조사와 위원회 자료 검토 및 협의결과 5개월 사업기간이 적정한 것으로 산정함

붙임 1. S/W 개발사업의 적정 사업기간 종합산정서 및 위원별 산정서 각 1부.

3. 위원별 서약서 각 1부.  끝.