투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시품질시험소
수신	총 무 과 장
(경유)
제목	기술용역 계약변경(준공기간 연기) 요청

1. 도로포장연구센터-389호(‘17.02.20)와 관련입니다.

2. 우리 센터에서 진행중인 “2016. 도로포장 상태조사 및 분석” 기술용역 계약변경(준공기한 연기)을 아래와 같이 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용역개요

○ 용 역 명 : 2016. 도로포장 상태조사 및 분석 용역

○ 용역기간 : `17.04.28. ~ `17.02.18.

○ 계약금액 : 331,532백만원

○ 수행기간 : ㈜로드테+동일기술공사

나. 계약변경 요청내용 : 준공기간 연기

○ 변경내용 : 당초 : `16.04.28. ~ `17.02.18.

변경 : ‘16.04.28.  ~ ’17.04.30

○ 변경사유 : *******************************

○ 귀책사유 : 서울특별시(지체상금 미부과)

붙임 : 1) 기술용역 준공연기 보고 방침서 1 부.

2) 준공기한 연기사유서 1 부.   끝.

	도로포장연구센터장
주무관	윤상열		도로포장연구센터장	02/20 백종은
협조자	주무관	김태우
시행	도로포장연구센터-392	(		)	접수		(		)
우	06763	서울시 서초구 태봉로 131 서울특별시품질시험소 도로포장연구센터	/
전화	02-3462-6718	/전송	02-3462-6710	/		/	부분공개(5)