문서번호	토목부-3492
결재일자	2017.2.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도시고속도로과장	토목부장
박운용		명경출	02/20 김영수
협조

가교 부대공 변경 검토보고

- 광복교~안양교 도로확장공사 -

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 2.

도시기반시설본부

(토목부)

가교 부대공 변경 검토보고

- 광복교~안양교 도로확장공사 -

안양교 교통우회용 가교의 부대공사(법면보호공, 낙하물방지시설, 측량) 변경 검토 보고임.

▢ 관련근거

○ 광안건 제2017-80호(2017. 2. 16.) : 가교 부대공 변경 실정보고

▢ 공사개요

○  위   치  : 구로구 개봉동 198-32~구로동 693-2

○ 규    모  : 도로확장(B=4~5차로→6차로, L=1.11km)

- 광복교 보도설치(L=67m), 안양교 철거 및 신설(L=275m, 아치교)

○ 공사기간  : '16. 4. 1. ~ '19. 9. 12

○ 도 급 비  : 43,433백만원(1차 : 4,710백만원)

○ 시 공 사  : ㈜케이씨씨건설

○  감 리 사  : ㈜동부엔지니어링외 2개사

○  공 정 율  : 11%

▢ 건설사업관리단 보고내용

○ 안양천에 설치된 공사용 가도 성토법면은 안전성 확보 및 경제성을 고려하여 당초 P.P마대를 톤마대로 변경하여 시공하고,

○ 서부간선도로 횡단구간과 보도 및 자전거도로를 횡단하는 구간에는 공사중 낙하물로부터 시민을 보호하기 위해 낙하물방지시설을 설치하여 안전사고를 방지함이 타당한 것으로 사료됨.

▢ 공사용 가도 성토법면 검토

○ 법면의 안정성을 확보하고, 경제성 및 시공성을 고려하여 P.P마대를 톤마대로 변경

당초 (P.P마대)
변경 (톤마대)

▢ 가교 낙하물방지시설 검토

○ 교통우회용 가교가 서부간선도로와 보도 및 자전거도로를 횡단하는 구간에는 시민의 안전을 위하여 낙하물방지시설(낙하물방지선반, 낙하물방지망) 설치

▢ 가교 시점부 토지관련 민원 해소

○ 가교 시점부 민원(광명테크노타운 지적측량 요청) : 지적측량 의뢰

▢ 수량 증감 대비표

공 종 명	규 격	단위	당 초	변 경	증⦁감	비고
낙하물방지선반 설치 및 철거		㎡	-	530	530
낙하물방지망 설치 및 철거		㎡	-	1,352	1,352
P.P마대 쌓기 및 철거		㎡	7,649	6,122	-1,527
톤마대 쌓기 및 철거	자재유용	개	-	250	250
톤마대 쌓기 및 철거	톤마대	개	-	537	537
지적측량비		식	-	1	1

▢ 공사비 증감 대비표

(단위 : 천원)

공 종	금 액		증 △감	비 고
	당 초	변 경
가. 직접공사비	326,639	337,194	10,555
낙하물방지선반 설치 및 철거	-	11,748	11,748
낙하물방지망 설치 및 철거	-	32,472	32,472
P.P마대 쌓기 및 철거	267,392	214,012	-53,380
톤마대 쌓기 및 철거	-	24,030	24,030
나. 제 경 비	116,260	113,505	-2,755
지적측량수수료	-	702	702
다. 공급가액	442,900	451,402	8,502
부가가치세	44,290	45,140	850
라. 도급공사비	487,190	496,542	9,352

▢ 조치계획

○ 상기 책임건설사업관리자의 보고내용과 같이 공사용 가도 성토법면에 대하여 법면 유실 방지 등 안정성 확보 및 경제성, 시공성을 고려하여 P.P마대를 톤마대로  변경하고,

○ 서부간선도로 및 안양천 고수부지 보도, 자전거도로 횡단구간에는 낙하물로부터 시민의 안전을 확보하기 위해 낙하물방지공을 설치하여 안전사고를 미연에 방지함이 타당하므로 추후 설계변경에 반영코자 함.

붙임 : 건설사업관리단 검토의견서 1부.  끝.