문서번호	도시철도토목부-3517
결재일자	2014.3.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		토목1과장	도시철도토목부장
황왕연		김성호	03/27 이은상
협 조
	토목3과장			김상우

『지하철 9호선 2,3단계』

'14년 03월 월간 공정회의 개최결과 보고

2014. 03

서울시도시기반시설본부

[도시철도토목부]

공정회의 개최결과 보고

지하철9호선 2,3단계 건설공사 현장의 소통의장 활성화로 원활한 사업추진을 위한 ‘14년 03월 공정회의 개최 결과 보고임

공정회의 개요

○ 일    시  :  2014. 03. 25(화) 15:00~17:30

○ 장    소  :  지하철921공구 현장 및 상황실

○ 참 석 자

∙ 본      부 : 도시철도 토목부장, 과장(토목1,3과), 각공구 업무담당

∙ 현장관계자 : 감리단장, 현장소장(915~923공구)

○ 진행방법

∙ 936정거장 집결후 쉴드터널 점검

∙ 상황실 이동후 쉴드TBM 홍보영상 시청

∙ 9호선 2, 3단계 공구별 공사 추진현황 및 현안사항 보고

∙ 각 현장별 20대항목 지적사항 설명 및 공유

지시사항

[공통사항]

○ 2단계구간 연말 마무리 될 수 있도록 중점관리 요망

○ 되메우기 및 복공철거시 차도지킴이 이행철저 및 신호수, 교통정리원 배치 철저

○ 공사구간 환경정비 실시

○ 출,퇴근시 공사로 인한 차로축소 금지 요망

※불가피한 경우 차도점용 승인후 시행

○ 유관기관 현장내 출입시 안전도구 착용등 통제 철저이행

○ 수익상가 창출

○ 쉴드TBM공법 적용현장(919~921공구) 누수 및 파손부 보강현황 조사보고 요망(윤원섭 주무관)

[각 공구별 지시사항]

○ 915공구

- 삼성파출소 개보수중 파출소 관계자 입회하여 매일 공사진척사항 확인토록 조치요망

- 동아지질 등 협력사 임원에게도 공사촉구 요청

○ 916공구

- 코엑스 연결통로 구간을 별도 관리하며 929정거장 4거리 단계별 도로 복구 가능여부 및 구체적인 방안 보고요망

○ 917공구

- 환승통로 구간 중점관리 요망

○ 918공구

- 터널구간 지하수 유출에 따른 침하등 이상유무 관리 철저

○ 919공구

- 3단계 쉴드TBM 적용된 공구 중 굴진량이 적은 이유 및 대책은?

○ 920공구

- 934정거장 공사 협력업체 조속 정리후 공사 추진요망

○ 921~923공구

- 특이사항 없음

회의결과 조치계획

○ 각 공구 공사관리관은 위 지시사항 이행여부을 수시 확인

○ 유관기관 현장내 출입시 안전도구 착용토록 협조요청 공문 발송(KT, 한전, 도시가스, 지역난방 등)

○ 쉴드TBM공법 적용현장(919~921공구) 누수 및 파손부 보강현황을 2014.04.01한 조사보고

[현장점검 및 공정회의 사진]

【공정회의】
(921공구 상황실 공정회의)	(936정거장 현황설명)
(921공구 쉴드TBM 현장점검)	(921공구 쉴드TBM 현장점검)

. 끝.