투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	성동도로사업소
수신	왕십리뉴타운제3구역 주택재개발정비사업조합
(경유)
제목	교통안전시설물 원인자부담공사 준공기한 변경 승인

1. 왕뉴3재조 제17-59호(2017.02.07.)와 관련입니다.

2. 왕십리뉴타운제3구역 주택개발정비사업조합에서 요청한 교통안전시설물(노면표시) 원인자 부담공사 준공기한 연기요청에 대해 아래와 같이 승인하오니,

3. 「교통안전시설 설치공사 원인자 준수사항」 및 「노면표시 시방서」에 따라 공사를 시행하여 주시고 공사완료 후 T-GIS시스템 입력 및 준공확인을 요청하시기 바랍니다.

가. 승인기간 연장

공사명		왕십리뉴타운주택재개발사업교통안전시설물 원인자부담공사(노면표시)	비고
공사기간	당초	2016.12.06.~ 2017.01.20.	공사관리번호 2016-0207-111
	변경	2016.12.06.~2017.03.31.
연기사유		토목공사 지연에 따른 공기연장

.

끝.

	서울특별시 성동도로사업소장
주무관	민병훈		도로보수과장	02/21 이상호
협조자
시행	도로보수과-942	(		)	접수		(		)
우	04807	서울특별시 성동구 자동차시장길 41 (용답동)	/
전화	02-2210-1538	/전송	02-2210-1549	/		/	대시민공개