등록번호	안전치수과-3728		주무관		치수팀장		안전치수과장		안전건설국장
등록일자	2017.2.21.
			안동욱		전일섭		신대식		전결 02/21 이우룡
결재일자	2017.2.21.
공개구분	부분공개(5)
			협조
『2017년 풍수해대비』 수방시설 및 수해취약지역 점검·정비 계획
안 전 건 설 국 (안전치수과)

『2017년 풍수해 대비』

수방시설 및 수해취약지역 점검·정비 계획

2017년 우기대비 수방시설, 공사장 및 수해취약지역에 대한 일제점검을 실시하고 우기전까지 정비를 완료하므로서 풍수해 대책에 만전을 기하고자 함

※ 관련근거 - 2017년 수해안전대책 관련 수방시설 및 수해취약지역 일제점검·정비 계획

(하천관리과-2017호, 2016. 2. 8.)

Ⅰ		점검대상

▢ 수방시설물

○ 빗물저류조(4개소)

○ 침사지(7개소)

○ 하수시설물(맨홀 7,955개소, 빗물받이 15,229개소 등)

▢ 풍수해 취약시설 및 지역

○ 민간 공사장(20) : 재개발․재건축, 대형건축공사장 및 장기공사중단 현장 등

○ 공공 공사장( 9) : 도로, 교량, 지하철, 상·하수도, 택지개발공사장 등

○ 사 면 시 설(18) : 옹벽, 축대, 절개지, 산사태․낙석 우려지역 등

○ 지 하 시 설(17) : 지하차도, 지하상가, 공동구, 지하철 등

○ 돌 출 시 설(363) : 대형입간판, 돌출간판, 철탑, 각종 표지판 등

▢ 소관부서별 자체점검 대상 현황

(단위 : 개소)

구 분	합계	민간 공사장	공공 공사장	사면시설	지하시설	돌출시설	저류조 (침사지)	맨홀	빗물받이
주택과	5	4		1
도심 재생과	6	5	1
건축과	11	11
공원 녹지과	5			5
도시 디자인과	75					75
도로 시설과	29			12	17
안전 치수과	23,203		8				11	7,955	15,229
교통 행정과	288					288
합계	23,622	20	9	18	17	363	11	7,955	15,229

Ⅱ		추진계획

▢ 점검 및 정비기간 : 2017. 3. 2. ~ 4. 21.

점검계획 수립방침 및 대상파악 제출 (2.17까지)		1차점검 시행 (3.2~3.24)		지적사항 보완조치 (3.13~3.24)		조치결과 제출 (3.31까지)
[총괄부서]		[소관부서]		[소관부서]		[총괄부서]
2차 집중점검 시행 (1차점검 시 구조적 취약, 피해우려 시설 및 공사장 위주) (4.3~4.14)		지적사항 정비완료 (4.10~4.14)		조치결과 제출 (4.21까지)
[소관부서]		[소관부서]		[총괄부서]

▢ 단계별 세부점검 계획

【1차 점검 및 정비】

○ 점검대상 : 부서별 자체 점검대상 공사장 및 시설(붙임참조)

○ 점검기간 : 2017. 3. 2. ~ 3. 24.까지

○ 점검방법 : 시설 및 공사장 소관부서장 주관하에 점검 시행

【2차 점검 및 정비】

○ 점검대상 : 1차점검 시 구조적, 피해우려 취약시설 및 공사장

○ 점검기간 : 2017. 4. 3. ~ 4. 14.까지

○ 점검방법 : 외부전문가 합동점검 시행

‣ 시설물 및 공사장 담당, 현장소장, 외부전문가 등 합동점검 시행

- 외부전문가 수당지급 : 2명 ×100,000원/명 = 200,000원

※ 예산과목 : 안전치수과, 하수시설관리, 하수시설 정비, 하수시설물 유지보수공사, 일반운영비, 사무관리비

▢ 주요 점검사항

○ 하수시설물 파손, 토사퇴적, 하수관로내 시멘트 유입 등 기능저하 여부

○ 공사장 주변 도로침하 여부

○ 사면시설에 대한 토사유출, 낙석 여부, 크랙 등 중점점검

○ 표지판, 간판 등의 전도위험 우려 및 철근의 부식 여부 등

▢ 조치계획

○ 점검결과 경미한 지적사항은 현장에서 즉시 시정토록 조치

‣ ’17. 4. 21.까지 1․2차 점검 지적사항에 대한 정비완료

○ 구조적 균열, 붕괴, 전도 등 징후 발견시 긴급 복구 시행

☞ 재난관리기금 등을 활용하여 우기전까지 조치 완료

○ 장기검토가 필요한 지적사항에 대하여는 별도 정비대책 수립 시행

Ⅲ		행정사항

▢ 점검 및 정비결과 제출 (관리부서 → 안전치수과)

○ 2017. 3. 31일 까지 : 1차 지적사항 및 조치결과 제출

○ 2017. 4. 21일 까지 : 2차 지적사항 및 조치결과 제출

붙  임 : 2017년 중구 수방시설 및 수해취약지역 일제점검대상 현황 1부.  끝.