문서번호	급수설비과-1514
보존기간	년
결재일자	2017.2.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관	급수설비과장	급수부장
이재학	최춘근	02/21 이규상
협 조

상수도공사 건설사업관리용역 (강남지역)

급수공사 주간실적 보고

2017. 2. 20.

상수도사업본부

(급수설비과)

상수도공사 건설사업관리용역(강남지역)

급수공사 주간실적 보고

상수도공사(급수,누수복구,시설물) 강남지역 건설사업감리용역에 대한 용역사로부터 제출된 주간실적을 검토하고 결과 보고 드림.

Ⅰ. 용역현황

□ 용역개요

○ 용역대상

- 급수공사 분야 (급수공사,불용관,보호통교체,포장 등) : 17,694건

- 누수복구 분야 (누수복구,포장,공사장 입회 등) : 16,752건

- 시설물 분야 (노후밸브교체, 배수지 시설물 등) : 3,145건

○ 용역기간: ’15. 6.22 ~ ’17. 6.21.(금차 : ’17.1.1~6.21.)

○ 계약금액 : 4,293,820천원 (금차분 : 1,141,110천원)

○ 도 급 자 : (주)이준엔지니어링, ㈜건양엔지니어링, (주)신성엔지니어링

□ 인력배치 현황

○ 배치위치 : 강동, 강남, 강서, 남부수도사업소

○ 근무인원 : 총 29명

- 급 수 13명, 누수 10명, 시설물 4명, 책임기술자 1명, 비상주 1명

Ⅱ. 주간 추진실적

□ 추진기간 : 2017. 2. 6.~ 2. 12.

□ 추진실적

○ 급수공사(건설사업관리기술자)

구 분		건설사업관리기술자			입회율 (%)	부설연장 (m)	시정조치 (건)
		감리대상건수(계)	현장감독 (건)	사후확인 (건)
금 주		114	101	13	88.6	268	2
누계	’17.1.1 이후	656	578	78	88.1	1,572	5
	’15.6.22 이후	14,367	12,827	1,540	89.3	53,129	226

- 시정조치(2건): 안전(1), 기타(1)

○ 포장복구공사(건설사업관리기술자)

구 분	계			급수공사업체 복구			포장업체 복구
	대상건수 (건)	현장감독 (건)	입회율 (%)	대상건수 (건)	현장감독 (건)	입회율 (%)	대상건수 (건)	현장감독(건)	입회율 (%)
금 주	91	75	82.4	6	6	100	85	69	81.2
누 계	475	391	82.3	63	63	100	412	328	79.6

○ 건설사업관리기술자 상호 업무지원

구 분	계				사업소 내				사업소간
	계	급수 공사	누수 복구	시설물	소계	급수공사	누수복구	시설물	소계	급수공사	누수복구	시설물
금주(회)	8	7	1	0	8	7	1	0	0	0	0	0
누계(회)	22	17	4	1	22	17	4	1	0	0	0	0

붙임 : 강남지역 건설사업관리용역 주간실적 공문 1부. 끝.