문서번호	시설관리과-3483
결재일자	2017.2.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	시설관리팀장	시설관리과장	강서수도사업소장
강은영	김근용	고신석	02/21 이인걸
협 조

설계변경 심의위원회 결과 보고

(2016년 강서수도사업소 관내 건설폐기물 처리용역)

2017. 2.

강서수도사업소

『2016년 강서수도사업소 관내 건설폐기물 처리용역』

설계변경 심의위원회 결과 보고

『2016년 강서수도사업소 관내 건설폐기물 처리용역-급수공사,누수복구,시설물』에 대한 설계변경 심의위원회를 개최하고 결과를 보고 드림

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 2016년 강서수도사업소 관내 건설폐기물 처리용역(장기계속단가계약)

○ 용역개요 : 건설폐기물 운반(㎥) 4,159㎥, 건설폐기물 처리(ton) 8,584ton

○ 계약기간 : 2016.04.19. ~ 2017.06.30.

○ 계약금액 : 금226,653,000원

○ 계 약 자 : ㈜진흥중공업 ****** 양

□ 설계변경 내용

○ 물량 증․감 내역

(단위,㎥)

공 종		수 량		증․감
		당초	변경
계		8,584	9,442	증) 858
폐아스콘	적치장, 현장→처리장(30㎞) (DT 24톤)	173	284	증) 111
폐콘크리트	적치장, 현장→처리장(30㎞) (DT 24톤)	5,623	5,509	감) 114
폐토사	적치장, 현장→처리장(30㎞) (DT 24톤)	2,788	3,649	증) 861

○ 사  유

- 건설폐기물 운반 및 처리물량 변동(증․감)

- 계약금액 증액에 따른 최종 변경

○ 계약금액 변경 내역

(단위,원)

구 분	금 액		증․감	비 고
	당초	변경
공급가액	206,048,182	225,841,819	증) 19,793,637
부가가치세	20,604,818	22,584,181	증) 1,979,363
도 급 비	226,653,000	248,426,000	증) 21,773,000

□ 심의위원회 개최 : 2017. 2.20.(월) 17:00 (강서수도사업소 4층 회의실)

□ 설계변경 심의위원회 검토 결과

○ 설계변경 타당성 : 타당함

○ 계약변동(증․감)물량 계약단가 적정 적용여부 : 적정

○ 제잡비 적정 산정 및 적용 적성성 : 적정

○ 각종 제반규정 준수여부 : 준수

□ 행정사항

○ 설계변경 시행 후 본청 재무과에 변경계약 의뢰

붙임 : 1. 설계변경 계획서 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.

3. 설계변경 심의결과서 1부.  끝.