투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	재사용플라자 건립공사 건설사업관리단 책임건설사업관리기술자 박 영 배 귀하
(경유)
제목	하도급 변경계약 승인 통보(재사용플라자 건립공사)

1. PC재사용17-105(2017. 2.15.)호와 관련입니다.

2. 우리본부에 검토 보고한 재사용플라자 건립공사 하도급 변경계약(도장공사외 5건)을 승인하오니 공정관리, 품질관리, 안전관리 등 건설사업관리용역 수행에 만전을 기하시기 바랍니다.

공 종	하도급업체	당 초	변 경	변경여부
도장공사	㈜동성공업도장 대표 임종득	261,580,000원	261,580,000원	변경없음
		2016. 6. 1.~ 2017. 1.17	2016.6. 1. ~2017. 3.15	기간변경
미장 및 조적공사	삼이씨엠(주) 대표 김치훈	809,600,000원	809,600,000원	변경없음
		2015.11.26.~ 2017. 1.14	2015.11.26. ~2017. 3.15	기간변경
철골공사	㈜포유이엔지 대표 이형곤	295,339,000원	295,339,000원	변경없음
		2016. 4. 1.~ 2017. 1.14	2016. 4. 1. ~2017. 3.15	기간변경
금속창호 공사	아세아이엔지(주) 대표 백성열	864,611,000원	864,611,000원	변경없음
		2015.11.27.~ 2017. 1.17	2015.11.27. ~2017. 3.15	기간변경
유리공사	지인유리건업(주) 대표 전춘봉	445,500,000원	445,500,000원	변경없음
		2016. 5.30.~ 2017. 1.14	2016. 5.30. ~2017. 3.15	기간변경
철거공사	씨이에프건설㈜ 대표 안장열	210,000,000원	210,000,000원	변경없음
		2015. 1.30.~ 2017. 1.14	2015. 1.30. ~2017. 3.15	기간변경

가. 하도급 변경계약 처리내용

끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	김찬유		환경시설과장	유현수		건축부장	02/21 김진용
협조자
시행	건축부-3004	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동 96번지)프리미어플레이스 13층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2649	/전송	02-3708-2659	/	kcy111@seoul.go.kr	/	부분공개(5)