투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	건설총괄부장
(경유)
제목	하도급 변경계약 승인내용 통보(재사용플라자 건립공사)

우리 본부가 사업시행 중인『재사용플라자 건립공사』의 하도급 변경계약이 체결되어 붙임과 같이 알려드리오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 하도급 변경계약 승인내용

공 종	하도급업체	당 초	변 경	변경여부
도장공사	㈜동성공업도장 대표 임종득	261,580,000원	261,580,000원	변경없음
		2016. 6. 1.~ 2017. 1.17	2016.6. 1. ~2017. 3.15	기간변경
미장 및 조적공사	삼이씨엠(주) 대표 김치훈	809,600,000원	809,600,000원	변경없음
		2015.11.26.~ 2017. 1.14	2015.11.26. ~2017. 3.15	기간변경
철골공사	㈜포유이엔지 대표 이형곤	295,339,000원	295,339,000원	변경없음
		2016. 4. 1.~ 2017. 1.14	2016. 4. 1. ~2017. 3.15	기간변경
금속창호 공사	아세아이엔지(주) 대표 백성열	864,611,000원	864,611,000원	변경없음
		2015.11.27.~ 2017. 1.17	2015.11.27. ~2017. 3.15	기간변경
유리공사	지인유리건업(주) 대표 전춘봉	445,500,000원	445,500,000원	변경없음
		2016. 5.30.~ 2017. 1.14	2016. 5.30. ~2017. 3.15	기간변경
철거공사	씨이에프건설㈜ 대표 안장열	210,000,000원	210,000,000원	변경없음
		2015. 1.30.~ 2017. 1.14	2015. 1.30. ~2017. 3.15	기간변경

붙임 : 하도급 변경계약(도장공사외 5건) 통보서 검토보고 1부. 끝.

	건축부장
주무관	김찬유		환경시설과장	유현수		건축부장	02/21 김진용
협조자
시행	건축부-2998	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동 96번지)프리미어플레이스 13층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2649	/전송	02-3708-2659	/	kcy111@seoul.go.kr	/	부분공개(5)