문서번호	급수운영과-6542
결재일자	2014.3.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수설비팀장	급수운영과장
손현정		代한현숙	03/27 代강동길
협조
	주무관		이철

상수도공사 기성(3차) 보고

「2013년 서원동외 10개동 상수도공사(장기계속단가계약)」

2014. 03.

남부수도사업소

급수운영과

상수도공사 기성(3차) 보고

「2013년 서원동외 10개동 상수도공사(장기계속단가계약)」

우리사업소에서 시행 중인 「2013년 서원동외 10개동 상수도공사(장기계속단가계약)」 에 대하여 계약업체로부터 정산요청서가 제출되어 아래와 같이 정산시행코자 보고드림

Ⅰ		공사 현황

○ 공 사 명 : 2013년 서원동외 10개동 상수도공사(장기계속단가계약)

○ 공사개요 : D15~400㎜, L=1,663m

○ 공사기간 : 2014.01.02 ~ 2014.06.30(총공사기간 2013.06.25~2014.06.30)

○ 도 급 액 : 금656,240,122원

○ 계 약 자 : (주)계산이엔씨  대표 계대영

Ⅱ		기성 현황

○ 기성(정산)차수 : 3차

○ 공사기간 : 2013.11.23 ~ 2014.02.21

○ 공사시행 : D=15~50㎜, L= 192m

○ 금회(3차) 기성금 : 금96,240,000원

○ 공사위치

- 관악구 조원동 546-22호외 99건 :  (신설공사비)

○ 예산과목별 지출현황

- 상수도사업비용, 영업비용, 급수공사비, 신설공사비   : 금96,240,000원

○ 기성지출현황

계약금액	전회 기성금액	금회(2차)기성금액	누계 기성금액	집행잔액	비고
656,240,122	360,646,000	96,240,000	456,886,000	199,354,122

Ⅲ		기성(2차) 검토결과

○ 물량 및 수량내역서 검토 : 이상없음

○ 관급 및 사급자재정산 수량 확인결과 : 이상없음

○ 공사현장 포장 및 주변정리 상태 확인결과 : 이상없음

○ 기타 사항 : 이상없음

Ⅳ		조치 의견

○ 위 내용과 같이 기성내역 검토결과 적정하므로 3차기성을 시행코자 합니다.

붙 임 : 1. 기성요청서 1부

2. 기성내역서(3차) 1부.  끝.