문서번호	급수운영과-3288
결재일자	2017.2.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	급수운영과장	강남수도사업소장	상수도사업본부부본부장
제영도	유용일	차장운	02/21 구아미
협 조
	행정관리팀장		김종진
	주무관		손병대

“명품 아리수, 명품 강남수도”
공무원직접수행 학술용역 연구계획서

2017.  2.

강남수도사업소

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	■	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□

공무원직접수행 학술용역 연구계획서

봉은배수지내 삼성가압장 고지대 급수구역에 소출수 현상이 발생되고 있어 원활한 급수운영을 위한 문제점 해결방안을 연구하고자 함.

□ 관련근거 : 2017년 공무원접수행 학술용역 운영계획(’17. 1. 23, 조직담당관)

1		현 황

□ 목  적

○ 봉은배수지 고지대 가압구역의 소출수 현상으로 지역주민의 급수불편 사항이 발생하고 있어 개선이 필요함.

○ 이에 대한 급수운영 문제점을 해결하기 위해 해소방안 등을 연구하고자 함.

□ 현  황

○ 봉은배수지내 삼성가압장은 건설 계획 당시 보다 급수구역내 다량급수처가 증가하여 공급량이 증가됨.

○ 공급량 증가로 삼성가압장 토출압력이 계획 압력보다 낮게 운영되어 고지대에서 소출수 현상이 발생

□ 개선의견

○ 가압구역 공급량을 감소시키고 계획된 토출압력으로 정상 운영하여 소출수 지역 해소 및 안정적인 급수운영 추진

○ 2차 가압장 폐쇄로 운영예산을 절감하고 연구 사례를 전파하여 효율적인 급수운영 체계 개선

2		연구내용

□ 연구과제

○ 시간당 최대 급수량 조절을 통한 가압구역의 안정적 균등급수 방안 연구                 - 봉은배수지 급수구역을 중심으로 -

□ 연구개요

○ 기    간  : 2017. 03. ~ 2017. 09.

○ 소요예산  : 4,600천원(연구경비 산출내역 별첨 5 참조)

○ 연구진(TF) : 강남수도사업소 급수운영과장외 팀원 4명

○ 연구내용

- 봉은배수지 급수구역의 공급량 감소로 가압장을 계획된 토출압력으로 운영하여 소출수 해소 및 2차 가압장 폐쇄

- 봉은배수지 공급량 및 사용량 현황 분석

- 다량급수처 현황 조사 및 공급량 조정 방안 마련

- 급수구역내의 경계밸브 현황 조사 및 누수 여부 조사

- 공급량 감소에 따른 토출압력 상승 및 2차 가압장 폐쇄 방안 제시

- 위치별 수압을 조사하여 급수구역 조절

○ 연구일정 : 연구과제 수행 일정표(별첨 4) 참조

- 2017. 3월    : 봉은배수지 공급량 및 사용량 현황 분석

- 2017. 4∼5월 : 다량급수처 조사 및 공급량 조정

- 2017. 6∼7월 : 경계밸브 현황 및 누수여부 조사

- 2017. 8월     : 급수구역 조절

- 2017. 9월     : 최종 보고서 제출

3		기대효과

○ 소출수 현상을 해소하여 안정적인 급수공급으로 시민 만족도 및 상수도 행정 업무 향상 도모

○ 2차 가압장 폐쇄로 운영예산을 절감하고 안정적이고 효율적인 급수운영 체계 개선

4		향후계획

○ 서울시 상수도사업본부 산하 급수운영 관리기관에 횡단전개

○ 효율적인 급수운영을 위한 참고자료 등으로 활용

5		행정사항

○ 자체 학술용역 심의회 개최

- 구성 : 위원장(상수도사업본부 부본부장), 위원(외부 3, 내부 3)

○ 공무원직접수행 연구계획서(붙임) 자료 등록 및 제출 : 조직담당관

- 학술용역관리시스템(전자결재 연동) 등록 및 제출

붙  임 : 1. 공무원직접수행 연구계획서

2. 유사 중복연구 자체 확인서

3. 연구 TF 구성도

4. 연구과제 수행 일정표

5. 연구경비 산출내역

6. 연구결과 활용계획서

7. 부서 자체 공무원직접수행 학술용역심의회 결과보고.  끝.