투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서 울 특 별 시 장(교통운영과장)
(경유)
제목	공사지연통보 (새문안로 중앙버스전용차로 설치공사)

우리부에서 시행중인 “새문안로 중앙버스전용차로 설치공사“와 관련하여 아래와 같이 공사가 다소 지연됨을 알려드리오니 관련업무에 참고하시기 바랍니다.

아  래

o 공사지연사항

- 보도포장 지연 (약15일)

․ 설계단계에서부터 지하매설물관련 유관기관(KT,SK브로드밴드,세종텔레콤, 한전,도시가스 등) 사전 협의가 없어 시공시 기관별로 협의함에 따라 일부 지연.

․ 한전 고압선로가 일부 포장면과 이격거리(토피)가 10cm에 불과하며 주변 통신관로 등으로 이설이 불가함에 따라 수차례 협의후 콘크리트 보강공사후 포장으로 결정됨에 따라 일부 지연.

․ 가로등 PC기초 매설이 통신관로, 한전 고압선로 등으로 설치가 불가하여 현장타설로 변경함에 따라 일부 지연.

끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	김상도		광역도로과장	진재섭		토목부장	02/22 김영수
협조자
시행	토목부-3645	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 12층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2558	/전송	02-3708-2599	/	ironksd@seoul.go.kr	/	부분공개(5)