문서번호	시설관리과-4927
결재일자	2017.2.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	시설관리팀장	시설관리과장	남부수도사업소장
정성오	권승계	김기상	02/22 전영석
협 조
	현장민원과장		代이규섭
	급수운영과장		최철민
	주무관		서규석
	주무관		조승용
	주무관		최선보

2017년 역류방지밸브 설치계획

2017. 2.

남부수도사업소

(시설관리과)

2017년 역류방지밸브 설치계획

수도계량기 후단에 「역류방지 밸브」를 설치하여 누수사고 등 단수 시 건축물 내의 정체된 물이나 오염 물질 역류에 의한 수질사고를 방지하여 깨끗하고 안전한 아리수를 공급하고자 함

□ 관련근거

○ 수도법시행령 제53조 및 서울특별시 수도조례 제17조(역류방지밸브의 설치)

- 수도계량기 후단에 역류방지밸브 설치 등 필요한 조치 의무화

○ 2007년부터 연차별 계획으로 추진[급수장치과-942(’06.8.16.)]

○ 2017년 역류방지밸브 설치계획 보고[급수장치과-1446(’07.2.20.)]

□ ’16년 추진실적

○ 목 표 량 : 10,350개

○ 설치실적 : 5,724개 (목표 대비 55.3%)

- 구경별 설치실적

구 분	계	15㎜	20㎜	25㎜	30㎜	40㎜	50㎜	비고
목 표	10,350	8,693	842	488	223	81	23
실 적	5,724	5,242	312	144	23	3

○ 역류방비밸브 설치 부진사유 및 개선대책

【부진사유】

- 수도계량기교체 위탁종사원 고용형태 변경에 따른 설치 실적 저조

▹ 당 초 : 만기계량기 및 역류방지밸브 설치 개수에 따른 성과 지급

▹ 변 경 : 기간제 근로자 → 시설관리공단 직원으로 전환(월급제)

- 내부배관 노후로 교체 시 배관파손 및 누수피해가 우려되어 계량기  교체원이 역류방지밸브 설치를 꺼려함

【개선대책】

- 역류방지밸브 교체중 연결관 파손 시 긴급누수복구 의뢰하여 처리

▹ 세대별계량기 연결관 및 옥내측 연결관 파손 시 긴급누수 복구업체 출동

- 수도계량기 교체사무 대행 협약을 맺은 서울시 시설관리공단과 역류방지밸브 설치에 대한 개선 방안 협의 필요(계측관리과)

- 역류방지용 수도계량기 발명(서울시 자체개발) 및 도입(본부검토사항)

※ 역류방지밸브와 수도계량기를 일체화하여 스프링 없이 물 흐름 방향에 따라 쉽게 개폐하여 소출수 문제의 해결과 확실한 역류방지기능을 하는 수도계량기 개발검토

□ ’17년 추진계획

○ 사업개요

- 추진기간 : 2017. 1. ~ 12.

- 목 표 량 : 8,000개 (만기계량기 교체 대상 : 32,800개)

▹ 역류방지밸브 교체주기 : 8년(수도미터기 교체주기와 동일)

- 역류방지밸브 설치 현황도

○ 세부 추진계획

- 구경별 대상 및 목표건수                             (단위 : 개)

구 분	계	15㎜	20㎜	25㎜	30㎜	40㎜	50㎜	신설 및 기타	비고
만기계량기 대상건수	32,800	26,628	3,056	1,662	653	506	295
역류방지밸브 목표건수	8,000	6,880	480	280	200	80	80	10,236* (목표건수 제외)

※ 신설 및 기타 역류방지밸브 목표건수 10,236개는 작년 설치 실적 반영

설치대상은 주계량기를 제외한 50㎜이하 수도계량기

- 분기별 설치계획

구 분	계	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기	비고
설치계획(개)	8,000	1,200	3,600	2,400	800
비 율(%)	100	15	45	30	10

※ 역류방지밸브 설치 경영실적 평가(절대평가 1점) 실적관리를 위하여 상반기 60% 추진

- 사업 추진방법

▹ 만기계량기 교체 시에 각 수도사업소 계량기 위탁 교체원이 역류방지밸브 병행 설치

▹ 신설계량기는 수도사업소의 급수공사업체에서 설치(GIS 자동연계)

□ 행정사항

○ 역류방지밸브 과별 추진실적 관리 : 시설관리과

- 신규설치(경영실적평가 미반영) : 급수운영과,시설관리과

- 역류방지밸브 교체설치(경영실적평가 반영) : 현장민원과

※ 만기수도미터기 교체시 역류방지밸브 교체 포함

- 급수운영과 및 현장민원과 담당자가 시설관리과 통보

○ 만기수도미터기(역류방지밸브) 교체계획수립 : 현장민원과

○ 역류방지밸브 사업소 추진실적 본부 보고 : 매월 5일

- 시설관리과 담당자가 본부 급수설비과 보고

붙 임 : 1. 역류방지밸브 설치관리대장 1부.

2. 역류방지밸브 설치 월보양식 1부.  끝.