투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	건설총괄부장
(경유)
제목	하도급변경 계약 알림(서남물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업)

1. 도화(서남)2017-046호(2017.2.16.)와 관련입니다.

2.『서남물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업』과 관련한 하도급 변경 계약 내용을 아래와 같이 송부하오니 관련업무에 참고하시기 바랍니다.

∘ 하도급 변경 계약 현황

구분	원도급사	공종	하도급자	하도급액 (천원)	하도급 비율(%)	하도급기간		비고
						당초	변경
1	대림산업(주)	구조물(1구간)	㈜국원토건	14,306,600	173.81%	‘16.06.17～’17.02.28	‘16.06.17～’18.02.28
2		구조물(2구간)	㈜국원토건	23,089,000	202.27%	‘16.07.07～’17.02.28	‘16.07.07～’18.02.28
3		구조물공사	㈜부강테크	1,592,800	95.96%	‘16.07.22～’17.02.28	‘16.07.22～’18.02.28
4		방수공사	중부건설(주)	3,019,500	83.28%	‘16.07.08～’17.02.28	‘16.07.08～’18.02.28
5		가시설공사	㈜엠에스이앤씨	1,249,600	91.47%	‘14.12.12～’17.02.28	‘14.12.12～’18.02.28
6		부력방지앵커	㈜지오텍코리아	1,960,079	277,41%	‘14.08.27～’17.02.28	‘14.08.27～’18.02.28

붙임 : 하도급계약 검토보고 1부. 끝.

	방재시설부장
주무관	조양연		환경시설과장	장수철		방재시설부장	02/22 남궁용
협조자
시행	방재시설부-2922	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 14층	/
전화	0237088783	/전송	0237088756	/	choaral@seoul.go.kr	/	부분공개(5)