세계가 인정한 아리수, 시민과 함께하는 중부수도!
	중부수도사업소
수신자	행정지원과장
(경유)
제 목	설계변경 및 차수별 금액변경 계약의뢰〔2016년 자동제어설비 유지관리 용역〕

1. 우리사업소에서 시행중인 「2016년 자동제어설비 유지관리용역(장기계속단가계약)」 건에 대하여 아래와 같이 설계변경 및 차수별(2차) 금액변경을 시행코자 계약의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 계약건명 : 2016년 자동제어설비 유지관리 용역(장기계속연간단가계약)

나. 계약업체 : ******************

다. 계약기간 : 2017.1.1~2017.2.28(총부기기간 2016.3.1~2017.2.28)

라. 설계변경 내용 : 자동제어 설비의 부품 교체, 수리물량에 대한 1차수와                                2차수를 물량합산 정산하여 집행금액 증액 설계변경.

마. 설계변경 내역

*

구 분	당 초(원)	변 경(원)	증감액(원)	비 고
총부기금액	84,020,950	92,175,250	증) 8,154,300	총 부기금액 에서 최종계약 금액 증액
1차수 계약금액	61,545,250	61,545,250	-
2차수 계약금액	22,475,700	30,630,000	증) 8,154,300

바. 계약금액 변경사유 : 용역의 과업 수행에 대한 자동제어설비 정기점검이                                     정상적으로 완료되었으나, 자동제어 설비의 부품교                                     체 및 수리물량을 1차수와 2차수를 합산하여 정산                                     하기 위한 집행비용이 집행잔액을 증액함에 따라                                      용역비가 증가되고, 사업의 계약기간 만료가 도래됨                                     에 따른 용역비용을 정산지급하기 위한 2차수 설계

변경.

사. 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 일반관리비, 수선유지교체비,

수선유지비(자동제어설비 유지관리 용역)

붙 임 : 1. 설계변경 방침서 1부.

2. 설계변경 심의결과 보고서 1부.

3. 설계변경 내역서 1부.

4. 합의서 1부.  끝

	시설관리과장
주무관	신인철		기전팀장	김충완		시설관리과장	02/22 허준행
협조자
시행	시설관리과-5558	(		)	접수		(		)
우	04605	서울특별시 중구 장충단로 88(장충동2가,중부수도사업소)	/
전화	02-3146-2226	/전송	02-3146-2239	/	richstar7964@seoul.go.kr	/	부분공개(6)