문서번호	교통정보과-3058
결재일자	2017.2.23.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		교통정보팀장	교통정보과장
설일환		김맹순	02/23 이경순
협 조
	운수정보팀장			김병곤
	버스정보팀장			정윤식
	도로정보팀장			최종선

「‘교통정보과 전산실’→ 상암 클라우드 센터 성공적 이전」을 위한

업무 추진 협의체 (TFT) 구성·운영계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 2.

도시교통본부

(교통정보과)

「‘교통정보과 전산실’➡ 상암 클라우드 센터 성공적 이전」을 위한

업무 추진 협의체 (TFT) 구성·운영계획

‘18년 이전 예정인 ‘교통정보과 전산실’의 클라우드 센터 이전과 관련,

장비 현황 파악, 서버 이전/이관 분류, 노후 S/W 재개발 등 성공적

이전 작업을 위한 실무자 중심의 업무추진 협의체를 구성 운영하고자 함

Ⅰ		추진개요

□ 추진근거

❍ IT-Complex 건립 기본계획 수립(‘08.06.18, 시장방침 제318호)

❍ 서울시 클라우드 컴퓨팅 기반 사업추진계획(데이터센터 소장, ‘14.10.21)

□ 추진방향

❍ 팀별 실무자 중심으로 구성, 시스템간 원활한 협조체계 구축

❍ H/W 및 노후장비 이관 시, S/W 재개발을 통한 클라우드 VM 이관

❍ 사업별 상주 공간, 운영인력 최소화, 토피스 통신망 일원화 구축

Ⅱ		추진 경과

□ 센터 이전 대비 ‘17년 유지관리 사업 발주

❍ ‘15년 ~ ‘16년 교통정보시스템, 버스정보시스템 이전에 용이한 플랫폼 구축

❍ ‘18년 클라우드 이전에 대비한 상주인력, AP, 하드웨어 구성, 무중단 이전

유/무 등 핵심 검토 방안 및 TF 팀 구성 대비 (4개팀 8개 시스템)

□ 실무 TF팀 구성 및 이전 준비

❍ 클라우드 안정적 이전을 위한 TF 사전 회의

- 회의 일시 / 장소 : 2017.2.10.(금) 14시 ~ 16시 / 교통정보과 회의실

- 참 석 자 : 교통정보과장 외 15명

- 회의내용 : 기 추진내역 보고 및 최종 장비현황 점검 등

❍ 상암동 클라우드센터 방문

- 방문 일시 / 장소 : 2017.2.14.(화) 14시~17시 / 상암동 클라우드센터

- 참 석 자 : 교통정보과장외 5명

- 주요내용 : 상암동 클라우드 센터 전산실 확인 및 기본 인프라 구성 점검

Ⅲ		TFT 구성 및 운영 계획

□ TFT 구성 : 총 14명

❍ TF 팀 총괄책임관 : 교통정보팀장

❍ TF 팀원

- 교통정보팀(2) : 팀장, 교통정보시스템 담당

- 도로정보팀(4) : 팀장, 교통관리시스템 · 유티스시스템 · 경찰청 관련 장비 담당

- 버스정보팀(3) : 팀장, 버스정보시스템 담당(2명)

- 운수정보팀(5) : 팀장, 자동차관련 정보시스템 · 무인단속시스템 · 운수정보시스템 ·

교통위반관리시스템 담당

※ 시스템별 유지관리 PM 및 네트워크 담당은 TF 협업 필요시 참여

❍ 분야별 추진 체계도

			실무 총괄 : 설일환
서버∙DB∙VM 구성 백업 구성∙스토리지						네트워크∙보안					S/W (상용·응용)						외부 연계 구성									모바일 구성
팀원	박양규 김순정 오현민 김진구					팀원	박양규 김순정 오현민 유영환 채윤석				팀원	박양규 김순정 오현민					팀원	박양규 오현민 김순정 유영환 이민화 채윤석								팀원		박양규 김진구 오현민
	홍제완(교통) 서영호(버스)						홍제완(교통) 임석재(버스)					임대빈(교통) 정희철(버스)						임대빈(교통) 홍제완(교통)								유정규(버스)

※ 주요 시스템인 교통정보시스템, 버스정보시스템 유지관리 요원 5명은 필수로 포함

□ 운영방안

❍ 운영기간 : 2017. 2. 21 ~ 센터이전 완료시 까지

❍ 운영방법 : 정기(월 2회) 및 수시 회의(현안사항 발생시)

※ 현안업무 검토는 서울시 데이터센터(정보자원운영과)와 업무 협업 추진

□ 추진과제 및 역할

구 분	주요내용
공통 과제	○‘18년 클라우드센터 성공적 이전을 위한 단계별 로드맵 마련 ○ 서비스 성격 및 이전 형태 검토(중단 / 무중단 서비스) ○ 클라우드센터 통신망 구성 및 DB 이전 시 IP 등 변경 범위 검토 ○ 외부 장비(BIT, VMS, 지자기 검지기 등) 원활 연계 방법 검토
시스템별 과제	○ 클라우드센터 이전에 필요한 시스템별 자료 조사 및 검토 ○ 자료 이관 시, S/W 재개발 대상 범위 및 ‘18년 예산반영 검토

Ⅳ		향후 추진일정

□ 주요일정

❍ ‘17. 3월 : 상암 클라우드 이전 최종보고서 검토

- 서울시 데이터센터 최종보고서(컨설팅) 내용 검토

❍ ‘17. 03월 ~ 04월 : 토피스 서버 중 ‘이전 또는 이관’ 검토 완료

❍ ‘17. 03월 ~ 06월 : 이관 S/W중 노후 S/W 재개발 대상 및 소요예산 검토

❍ ‘17. 06월 ~ 07월 : ‘18년 정보화예산타당성 협의 및 자료등록

❍ ‘17. 09월 ~ 12월 : ‘18년 예산확정 및 발주 준비

❍ ‘18. 01월 ~ 08월 : S/W 재개발 및 이전 준비

❍ ‘18. 06월 ~ 12월 : 시스템별 이전 및 안정화

붙 임 : 실무추진단(TFT) 구성원 명단 1부.

붙 임

실무추진단(TFT) 구성원 명단

구 분	구 성			역할분야	비 고 (실무TF 참여)
총괄책임관	교통정보팀장			TF 추진 총괄
실무TFT	교통정보팀	설일환 (총괄)		실무 TF 총괄담당 센터이전 종합계획 수립 등 교통정보시스템 이전 담당	○
	도로정보팀	김순정 (팀 총괄)	김순정	교통관리시스템 이전 담당	○
			유영환	자가통신망시스템 이전 담당
			안재성	경찰청 관련 장비 이전 담당
	버스정보팀	박성수 (팀 총괄)	오현민	버스정보시스템 이전 담당	○
	운수정보팀	박양규 (팀 총괄)	박양규	자동차관련 정보시스템 이전담당	○
			김병오	운수정보시스템 이전담당
			정 택	교통위반관리시스템 이전담당
			채윤석	무인단속시스템 이전담당
공통사항				시스템별 유지관리 PM 협업시 참여	○