문서번호	총무과-6706
결재일자	2017.2.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		통신관리팀장	총무과장
조윤현		김완집	02/23 정상택
협조

「일자리플러스센터 및 공공크리에이터즈 사무실」

통신네트워크 설치 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 2.

행 정 국

(총무과)

「일자리플러스센터 및 공공크리에이터즈 사무실」

통신네트워크 설치 계획

무교별관 일자리플러스센터 및 공공 크리에이터즈 사무공간의 신규 및 재배치관련 전화, LAN 등 통신공사를 원활히 추진하여 편리하고 안정적인 통신서비스를 제공하고자 함

1		관련 근거

❍「사무실 통신공사 및 전화기 설치 협조요청」(‘도시브랜드담당관-1389. ’17.2.17.)

❍「일자리플러스센터 부서재배치 계획 보고」(총무과-6449, ‘17.2.22)

2		공사 개요

❍ 공사일자 : 2017.2.26(일) 09:00~18:00

❍ 대상부서 : 일자리플러스센터(무교 3층), 공공 크리에이터즈(무교 4층)

❍ 공사내용 : 전화 및 전화회선 신규 설치, 간선 통신케이블 신설,

전화 통신 상태 최종 확인 등

※ 상담사 등 기간제근로자 근무로 전화, LAN 분리 구축 추진

※ LAN 공사는 정보통신보안담당관에서 실시

❍ 소요예산 : 본관 청사 통신공사 연간단가 비용 처리

※ 계약업체 : ㈜쏘울아이티

❍ 주요 통신 공정 사항

- 사무실 기존 통신케이블 철거

- 전화회선(36회선) 및 일반전화기 신규 설치(13대)

- 간선 UTP케이블 및 패치판넬 등 통신부속 자재 설치

3		공사 일정

❍ 세부 통신공사 일정

일 정	부서명	위 치	공사내용	비 고
‘17.2.22(수)	일자리플러스센터 등	무교3,4층	▪사전 환경 실사 ▪사무실 좌석배치도 확인 등
‘17.2.24(금)	일자리플러스센터	무교 3층	▪사무실 집기 재배치 실시	(시설팀)
‘17.2.26(일)	일자리정책담당관 (일자리플러스센터)	무교 3층	▪전화회선 공사	(통신팀) 재배치
	도시브랜드담당관 (공공 크리에이터즈 사무실)	무교 4층	▪일반전화 신규 설치(13대) ▪전화회선 설치 공사	(통신팀) 신설

※ 추후 출입관리단말기 신규 설치(공공 크리에이터즈 사무실)

※ PC연결 및 통신상태 확인 : 정보통신보안담당관

4		행정사항

❍ 통신시설 설치시 안전에 주의토록 조치

❍ 해당 부서 업무 시작 전 모든 통신시설 설치 및 시험 완료 추진