투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울대공원
수신	총무과장
(경유)
제목	서울대공원 동선체계 개선 기본계획 용역 준공기한 연기 시행

『서울대공원 동선체계 개선 기본계획 용역』에 대하여 아래와 같이 준공기한 연기를 시행하고자 합니다.

1. 용 역 명 : 서울대공원 동선체계 개선 기본계획 용역

2. 도급금액 : 금80,536,000원

3. 용역기간 : 2016. 7. 15. ~ 2017. 2. 28.

4. 계약업체 : 주식회사 효광엔지니어링 대표 진영란

5. 연기기한 : 2017. 4. 15.까지

6. 연기사유 : 붙임 참조

7. 지체상금 부과여부 : 미부과

붙임 : 1. 준공기한연기 의뢰서 1부.

2. 합의각서 1부.

3. 검토보고서 1부. 끝.

	전략기획실장
주무관	김성태		주무관	이옥하		전략기획실장	전결 02/23 윤대진
협조자	주무관	정한성
시행	전략기획실-793	(		)	접수		(		)
우	13829	경기도 과천시 대공원광장로 102 (막계동)	/	http://grandpark.seoul.go.kr/
전화	02-500-7041	/전송		/	kst2006@seoul.go.kr	/	부분공개(5)