투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	건설총괄부장
(경유)
제목	계약변경 의뢰_총차, 1차 (도시고속도로 연결램프(정릉길)설치 전기공사)

우리 본부에서 시행 중인『도시고속도로 연결램프(정릉길)설치 전기공사』와 관련 설계변경 사항이 있어 아래와 같이 계약변경을 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명: 도시고속도로 연결램프(정릉길)설치 전기공사

나. 계 약 자: ㈜성강통신기술사사무소  (대표자 안치영)

다. 계약변경 내용

구 분	도 급 비(원)			계약기간 (변동없음)	비 고
	당 초	변 경	증 ․ 감
총 차	168,053,630	206,853,630	증) 38,800,000	2015. 02. 13. ~ 2017. 12 .29.
1 차	40,000,000	38,290,000	감) 1,710,000	2015. 02. 13. ~ 2017. 02. 28.	내역조정

※ 1차수 공사 내역조정으로 인한 감액부분은 2차수 공사에 시행

라. 예산과목 : 안전총괄본부 도로계획과 / 도로 건설 / 도시고속도로망 확충(도시개발특별) / 도시고속도로 연결램프 추가설치 / 시설비

붙임	1) 설계변경 요청사항 검토 보고서 1부.

2) 설계변경 내역서(총차, 1차) 각 1부.

3) 합의각서 1부.   끝.

	설비부장
주무관	박기범		시책사업과장	임현근		설비부장	02/23 권오식
협조자
시행	설비부-2937	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 (무교동) 프리미어 플레이스빌딩 15F	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02) 3708-8646	/전송	02) 3708-8659	/	kbpark@seoul.go.kr	/	대시민공개