“성별분리통계”성평등정책 수립의 기초입니다.
	서울특별시
수신자	재무과장
(경유)
제 목	용역 과업기간 연장 요청

1. 우리부서에서 시행중인 아래 용역과 관련하여 과업기간을 연장요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용역개요

- 건  명 : 차집관로 성능개선 기본 및 실시설계 용역

- 개  요 : 차집관로 성능개선 기본 및 실시설계 L=11.2Km, 기타

- 도급사 : ㈜이산 외 2개사

나. 과업기간 연장요청 내용

- 당초 : 2016.4.20.~2017.10.11.(1차분 : 2016.12.31)

- 변경 : 2016.4.20.~2017.10.11.(1차분 : 2017.4.30)

※ 연장사유 : 추가 과업물량(개봉유수지) 수행, 과업 대상물량 일부 변경 등.

끝.

	물재생시설과장
전문관	박만헌		주무관	최정윤		물재생운영팀장	정훈모		물재생시설과장	02/23 이철해
협조자
시행	물재생시설과-2942	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 (물재생시설과 - 서소문청사 1동 8층)	/
전화	02-2133-3831	/전송	02-2133-1043	/	parkmjr@seoul.go.kr	/	대시민공개