문서번호	도시철도계획부-2048
결재일자	2017.2.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		계획과장	도시철도계획부장
박종필		최병훈	02/24 권영찬
협조

부산지하철 1호선 연장

건설 및 시운전 현황 견학 결과 보고

2017.2

도시철도계획부

부산지하철 1호선 연장

건설 및 시운전 현황 견학 결과 보고

Ⅰ		견학개요

○ 일  시 : 2017.2.22.(수)

○ 장  소 : 부산지하철 1호선 연장 건설사업구간

○ 견학자 : 9명

- 이윤권과장, 박종필, 신한철, 임근호, 이병석, 안대성, 박준우, 김현기, 윤득근

○ 견학내용 : 부산지하철1호선 연장구간 건설 및 시운전 현황

Ⅱ		부산지하철 1호선 연장건설 현황

동매역

장림역

신장림역

낫개역

다대포항역

다대포해수욕장역

신평차량기지

○ 구    간 : 1호선 신평기지 ~ 장림동 ~ 다대포해수욕장

○ 사업규모 : 총연장 L=7.98km, 본선 L=7.02km, 정거장 L=0.96km

(정거장 6개소, 회차시설 1개소)

○ 사 업 비 : 9,589억원 (국비 : 5,404억원 / 시비 : 4,185억원)

○ 사업기간 : 2006년 ~ 2017년  ※ 시스템 : 중량전철(1호선 연장)

○ 시공회사 : 현대건설 등 36개사(지역업체 24개사 포함) 【 6개 공구】

○ 추진경위

- ‘08.  6월 : 기본계획 승인 고시

- ‘09. 11월 : 턴키공사 1~4공구 착공[’10.9월 5,6공구 착공]

- ‘10. 01월 : 사업계획 승인고시

- ‘16. 07월 ~ 10월 : 지상차상 결합시험

- ‘16. 11월 ~ 12월 : 본선 시험운행 및 관제 연동시험

- ‘16. 12월 ~ : 철도종합시험운행 시설물 검증 시험 중

※ ‘17. 4월 : 개통예정

Ⅲ		견학결과

【 수범사례 】

○ 분야별 이해관계가 있는 공종에 대해 T/F팀 구성으로 공정관리

○ 총사업비 반영 의견 발생시 중앙정부(기재부,국토부)와 합동 현장 답사로 문제 해결

- 예) 기존차량 및 신규차량의 시스템 호완 적용 등

【 요청사항 】

○ 서울지하철건설의 경험과 기술력 및 자료에 대한 공유 요청

→ 서울시 경험과 기술력 습득을 위해 방문 예정

Ⅳ		향후계획

○ 국내 주요 건설사업 현장 견학으로 업무수행 능력 향상

○ 주요 건설사업의 수범사례 활용 방안 검토

○ 우리시 지하철건설의 경험과 기술력 홍보

붙임 : 현황사진 1부.  끝.