문서번호	녹지관리과-928
결재일자	2017.2.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	녹지관리과장	공원부장
방일길	문경재	02/24 문길동

2017년 공원시설물 보수정비공사(연간단가) 추진계획

2017. 2

한강사업본부

(녹지관리과)

2017년 공원시설물 보수정비공사(연간단가) 추진계획

한강공원 내 운동장 및 공원시설물에 대한 연중 수시정비를 실시하여 공원을 이용하는 시민들에게 안전하고 쾌적한 휴식공간 제공 및 공원이용 만족도를 향상하고자 함

Ⅰ		시설현황

□ 운동시설 : 축구장 등 23종 276면, 체력단련기구 943점

□ 편의시설 : 음수대 157개소, 그늘막 439개소, 의자 3,799개소

□ 놀이시설 : 어린이놀이터 16개소

Ⅱ		추진방향

□ 공원시설물 연중 수시정비를 통한 시민불편 및 안전사고 사전 예방

□ 주민요구사항 반영 및 노후되어 안전상 교체가 필요한 시설물 즉시 정비를 통하여 시민불편 최소화

Ⅲ		사업개요

□ 위    치 : 광나루 한강공원 등 11개 공원 전체

□ 사업기간 : 2017. 2 ~ 2017. 12

□ 사업내용 : 공원시설(운동ㆍ편의ㆍ놀이) 보수 및 정비, 배구장 등 마사토 포설, 자전거도로 관통 급수관로 설치, 민원사항 처리 등

- 광나루 : 음수대 교체 및 체력단련기구 정비 등

- 잠  실 : 족구장, 배구장 라인마킹 교체 및 마사토 작업 등

- 뚝  섬 : X게임장 정비, 체력단련기구 정비, 비구방지망 휀스 설치 등

- 기타공원 : 음수대 교체, 급수관로 설치, 운동장 마사토 작업 등

□ 사 업 비 : 금266,780천원

□ 예산과목

- 한강공원 관리 및 운영, 한강공원 시설물 관리 및 개선, 한강공원 이용시설 유지관리, 시설비

- 건설공사 설계수준향상, 건설기술 향상교육 및 우수건설관계자 시상, 기술용역 자체설계를 위한 설계도면 작성지원, 시설비(기술심사담당관 재배정)

Ⅳ		추진방법

□ 설계용역 : 도면작성용역(수의계약)

- 용 역 비 : 금6,780천원

- 사    유 : 다가오는 봄철을 대비하여 시민들의 본격적인 공원시설물

이용 이전까지 조속한 시행을 위하여 조경 및 체육시설    분야 설계용역 경험이 있는 업체와 수의계약으로 진행

- 예산과목 : 건설공사 설계수준향상, 건설기술 향상교육 및 우수건설관계자 시상, 기술용역 자체설계를 위한 설계도면 작성지원, 시설비

□ 공사발주 : 일반경쟁입찰(지역제한)

- 공 사 비 : 금260,000천원

- 관련법규 : 건설산업기본법에 의한 서울시 소재 조경관련 건설업종

(조경시설물설치공사업 면허소지업체)

- 예산과목 : 한강공원 관리 및 운영, 한강공원 시설물 관리 및 개선, 한강공원 이용시설 유지관리, 시설비

Ⅴ		추진일정

추진절차	추진기관	추진내용	추진일정
① 사업계획 수립	한강사업본부	∙ 사업계획 수립	2017. 2
⇩
② 도면작성용역 시행	한강사업본부	∙ 도면작성용역 발주 및 착수	2017. 2
	한강사업본부	∙ 도면작성용역 완수	2017. 3
⇩
③ 공사발주	한강사업본부	∙ 공사발주	2017. 3
⇩
④ 공사시행 및 준공	한강사업본부	∙ 공사시행	2017. 3 ~
	한강사업본부	∙ 준공	2017. 12

Ⅵ		기대효과

□ 시민불편 및 안전사고 우려되는 노후 공원시설물 재정비에 따른 시민불편 최소화

□ 주민요구사항에 대한 신속한 정비로 시정 이미지 제고