투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	건설총괄부장
(경유)
제목	준공기한 연기 의뢰(여의도 지하벙커 개선 전기, 통신공사)

1. 설비부-3034(2017.2.24.)호와 관련입니다.

2. 여의도 지하벙커 개선 전기․통신공사 준공기한 연기를 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 준공기한 연기 의뢰 내용

구 분		당 초	변 경	비 고
여의도 지하벙커개선 전기공사	1 차	`16.11.21. ~ `17.2.28.	`16.11.21. ~ `17.5.30.	금액변동 없음
	총 차	`16.11.21. ~ `17.6.30.	변경없음
여의도 지하벙커개선 통신공사	1 차	`16.11.21. ~ `17.2.28.	`16.11.21. ~ `17.5.30.
	총 차	`16.11.21. ~ `17.2.28.	변경없음

나. 귀책 소재 및 연기사유

- 연기에 따른 귀책 소재 : 도시기반시설본부

- 지체상금 : 미부과

- 연기사유 : 선행공종인 건축공사 공기 연장에 따른 준공기한 연장

붙임  1. 준공기한 연기 검토보고서 1부.

2. 준공기한 연기 의뢰서(합의서 포함) 1부.  끝.

	설비부장
주무관	성호준		열빛총괄과장	유병기		설비부장	02/24 권오식
협조자
시행	설비부-3061	(		)	접수		(		)
우	04520	서울시 중구 청계천로8(무교동 96) 프리미어플레이스빌딩 15층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8602	/전송	02-3708-8659	/	junilove@seoul.go.kr	/	대시민공개